업무연락전
작 성 자	이승훈	작성일자	2022-08-04	문서번호	도시기반시설본부-22-11065
대상현장	[노들로 구조개선공사(장기1차)]주식회사 도화엔지니어링,(주)평산포장건설,하송종합건설(주)
제 목	당산초교 교차로 설치 구간 작업지시
내 용
가. 노들로 구조개선공사 중 당산초등학교 앞 교차로 설치구간에 대하여 아래와 같이 작업지시 하오니 공사 완료를 위한 세부 공정계획을 제출하고, 작업 전 보고하여 주시기 바랍니다. 나. 작업지시 상세 - 내 용 : 휴일 작업지시 - 대 상 : 당산초교 교차로 설치 구간 - 기 간 : 2022. 8. 8. ~ 2022. 9. 3. - 사 유 1) 당산초등학교 방학기간('22. 7. 23. ~ '22. 8. 24.) 활용하여 교차로 설치 완료 필요 ※ 당산초등학교 및 학부모 운영위원회 요청사항(등하교 학생 안전사고 우려) 2) 방학 시작 이후 교통규제심의 변경 완료('22. 8. 2.) 및 8월 초 기상악화(우천)로 인하여 착수가 지연된 바, 기간내 공사 완료를 위해 작업일수 확보 필요
붙임 :

서울특별시