업무연락전
작 성 자	조동협	작성일자	2022-08-01	문서번호	도시기반시설본부-22-10871
대상현장	[월드컵대교건설공사]주식회사 포스코건설,삼성물산 주식회사
제 목	수정예정공정표 조건부 승인 알림
내 용
1. 삼건(월드컵)2022-513호(2022. 7. 6)와 관련입니다. 2. 우리본부와 도급계약 체결되어 사업추진중인 「월드컵대교 건설공사」의 안양천 내 수해예방기간 유수장애시설물 철거요청에 따른 남단 연결램프 공사의 수정공정 제출건에 대해 내용 검토 결과 동절기는 기 공정계획 수립 시 검토된 내용으로 본 사안과 관련이 없는 것으로 판단하여 당초 요구한 18개월 연장건을 14개월 연장으로 조건부 승인하고자 함을 알려드리며, 3. 본 조건사항에 대해 이견이 있을 경우 22. 8. 5일한 회신하여 주시기 바라며 기한 내 회신이 없을 경우 계약관련 후속조치를 하고자 하오니 이 점 양지하시기 바랍니다. 끝.
붙임 :

서울특별시