업무연락전
작 성 자	조동협	작성일자	2022-07-26	문서번호	도시기반시설본부-22-10616
대상현장	[제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사]동부엔지니어링 주식회사,주식회사 경동엔지니어링,주식회사 천일,삼부토건 주식회사
제 목	수정 공정계획 조건부 승인 알림
내 용
1. 제2자유입건 제2022-249호(2022. 7.19.)와 관련입니다. 2. 우리본부와 계약체결되어 건설공사 추진중인 본 사업에 대해 수정 공정계획을 제출한 바 있으며 신청사유를 검토한 결과 사유는 충분하나 계약상대자 간 귀책 사유로 보기 힘든 대외적 요인에 의한 점을 감안하여 공사 지체배상금 또는 공기연장에 의한 계약금액 조정 청구 등은 상호 상쇄하는 조건부 승인을 하고자 하오니 조건내용 검토 후 22년 7월29일한 의견회신 바라며 기한 내 회신이 없을 경우 본 조건을 수용한 것으로 갈음하여 계약관련 후속조치를 시행할 예정임을 알려드립니다. 끝.
붙임 :

서울특별시