업무연락전
작 성 자	이승훈	작성일자	2022-06-27	문서번호	도시기반시설본부-22-9122
대상현장	[노들로 구조개선공사(장기1차)]주식회사 도화엔지니어링,(주)평산포장건설,하송종합건설(주)
제 목	신길역교차로 좌측 노견 가드레일 우선시공 승인
내 용
가. 노들건 2022-210호(2022. 6. 27.)와 관련입니다. 나. 신길역교차로 좌측 노견 가드레일 우선시공 승인요청과 관련하여 검토 후 승인처리하오니 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 1) 보고내용 : 실시설계 완료 이후 교통규제심의가 변경(최종)됨에 따라 도면에 맞게 시공하기 위하여 신길역 교차로 좌측 노견 가드레일 이설 필요 2) 이설규모 : 가드레일 약174m, 예상 증가 개략공사비 1,573천원 3) 단면도 4) 우선시공 승인사유 - 실정보고 제출 및 승인까지 다소 시일이 소요되는바, 경미하게 변경되는 사항에 대하여 우선시공 승인하여 우기철 교통안전사고를 예방하고자함. 붙임 : 가드레일 이설 우선시공 승인요청 1부. 끝.
붙임 :

서울특별시