업무연락전
작 성 자	이제관	작성일자	2022-05-06	문서번호	도시기반시설본부-22-5317
대상현장	[AI지원센터 건립공사(장기1차)](주)세움이앤씨건축사사무소,(주)종합건축사사무소근정,주식회사 동해종합기술공사,(주)마노종합건설,대라수건설 주식회사,웰튼건설(주)
제 목	실정보고 및 관급자재 사급전환 승인 통보
내 용
귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다 작성일자 : 2022. 5.06.(금) 지시내용 가. 근정제2022-158(`22.04.27)호, 근정제 2022-171(`22.05.02)호와 관련입니다. 나. 우리본부에서 추진중인 AI지원센터건립공사 「AI지원센터 건립공사」관련 래커주위 보강 철근 누락 실정보고 및 사급전환 실정보고 건에 대하여 우선 승인하오니 품질 및 공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다, 다. 아울러, 실정보고 승인에 따른 향후 계약금액 조정은 우리 본부 설계변경 절차(또는 계약심사) 등에 따라 최종 조정 될 수 있음을 알려 드리니 업무수행에 차질없기를 바랍니다. 끝.
붙임:

서울특별시