업무연락전
작 성 자	이재미	작성일자	2022-04-06	문서번호	도시기반시설본부-22-3851
대상현장	[제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사]동부엔지니어링 주식회사
제 목	조경공사 실정보고 승인 통보(월드컵로 선형변경에 따른 지장수목 저촉수목 정비)
내 용
가. 제2자유입건 제22-016호(2022.3.31.)와 관련입니다. 나. 위 호로 귀 건설사업관리단에서 승인 요청한“제2자유로 종점부 입체화공사"의 월드컵로 선형변형에 따른 저촉수목 정비 실정보고건에 대하여 승인 통보하오니 ※ 제거계획인 큰나무에 대해서 우리시에서 2022. 4. 8.까지 수목 사용처 조사를 실시 중에 있으며 활용가능한 수목이 있을 시 별도 통보 예정. 재활용 수목은 굴취후 현장상차 등 작업계획 변경 지시 계획 다. 책임건설사업관리기술인은 공정관리와 안전사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바라며, 공사비 증감사항에 대해서는 설계변경에 반영하여 주시기 바랍니다. 라. 아울러, 금회 저촉수목 정비 후 조경복구를 위하여 조경분야 전문가 자문과 유관기관 협의에 필요한 행정처리기간을 감안해 복구계획(안)을 수립하여 추가 실정보고하여 주시기 바랍니다. 끝.
붙임 :

서울특별시