업무연락전
작 성 자	조동협	작성일자	2024-05-20	문서번호	도시기반시설본부-24-54303
대상현장	[서울 사진미술관 건립공사](주)종합건축사사무소근정,주식회사 동해종합기술공사,주식회사 유탑엔지니어링,신한토건(주)
제 목	우.오수관로 선형변경 및 우수관로 추가 설치 실정보고 승인 알림
내 용
1. KDU(대외, 사진) 제24-0181호(24. 5. 8)와 관련입니다. 2. 우리부 건설공사인 「사진박물관 건립공사」의 우.오수 관로 선형변경과 우수관로 추가 설치 실정보고 건에 대해 터파기 시 시방규정을 준수하여 시공할 것을 조건부으로 승인 처리하며 원활한 공정관리를 위해 선 조치 후 계약금액조정 하실것을 알려드립니다. 끝.
붙임 :

서울특별시