업무연락전

작 성 자

조동협

작성일자

2024-05-23

문서번호

도시기반시설본부-24-54539

대상현장

[서서울미술관 건립공사(장기1차)]주식회사 에이치케이건축사사무소,(주)성림이엔씨

제    목

추가 공사 및 계약금액 조정 알림

내    용

1. 우리부 건설공사인 「서서울미술관 건립공사」의 주차장 진출입구간이 금천구청 주차장 진출입구과 병행 사용토록 설계되어 있고 해당 구간에 대해 일부 포장계획이 잡혀 있으나 금천구청 요구로 확장 포장하기로 결정되어 안내하오니 추후 해당구간 포장 시 추가 공사를 진행하여 주시고 이로 인한 물량증가 계약금액조정을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 추가 공사 구간

당초 계획(면적 175㎡)	금천구청 요구(면적 544㎡, 증 369㎡)

나. 추가 공사내용

1) 아스콘 덧씌우기(적색 구역)

2) 이동식 방호 바리케이드 레일 철거. 끝.

붙임 :

서울특별시