□ 공통 요구자료 (산하사업소 포함)

7. 설계변경 공사현황    ‥ (교통운영과)

- 총차를 기준으로 최종 설계변경 사항 기재

당 초 (최초계약)					변경후 (최종 차수)					발주부서 (담당 전화번호)
공 사 명	회 사 명	계 약 일	완 공 예정일	계약금액	변경계약		완 공 예정일	계약금액	변경사유
					차수	일자
2013년 교통사고 잦은 곳 개선 사업 교통신호기 공사	㈜이피이	‘13.07.22	‘13.12.27	207,728,490	1	‘13. 12.20	‘13.12.27	275,935,000	물량증가	서부도로사업소 기전과 (호정오, 300-8395)
2013년 교통사고 잦은 곳 개선 사업 교통신호기 공사(2차)	광명신호㈜	‘13.09.27	‘14.02.26	80,591,105	1	‘14. 02.25	‘14.02.26	76,450,000	물량감소	서부도로사업소 기전과 (호정오, 300-8395)
2013년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사	㈜신일전기	‘13.10.08	‘14.03.30	225,706,600	2	‘14. 03.27	‘14.03.30	248,160,000	물량증가	남부도로사업소 기전과 (허송욱, 3284-5432)
2013년 교통사고 잦은곳교통신호기공사	㈜아이캔두	‘13.11.04	‘14.02.28	244,575,420	2	‘14. 02.22	‘14.02.28	261,640,000	물량증감	북부도로사업소 기전과 (박신범, 944-5472)
교통사고 잦은곳 개선 교통신호기공사	대동 종합전설㈜	‘13.07.25	‘14.02.28	472,070,403	1	‘13. 12.20	‘14.02.28	482,289,700	물량변경	성동도로사업소 기전과 (채희준, 2210-1543)
교통사고 잦은곳 개선 교통신호기공사 (2차)	서림 기전개발㈜	‘13.08.27	‘13.12.31	133,999,165	1	‘13. 12.20	‘13.12.31	149,440,000	물량변경	성동도로사업소 기전과 (채희준, 2210-1543)
2013교통사고잦은곳 개선사업	대주 산업개발	‘13.07.03	‘13.09.30	15,687,000	1	‘13. 09..25	‘13.09.30	16,300,000	물량 변경	중구 교통행정과 (정종광, 3396-6212)
2013년 교통소통 및 사고 잦은 곳 개선공사	한맥종합 건설㈜	‘13.09.10	‘13.12.10	19,990,000	1	‘13 11.06	‘13.12.10	19,990,000	물량변경	강북구청 교통행정과 (최영덕, 901-5924)
2013년 교통사고 잦은곳 개선사업	㈜수산 이엔택	‘13.12.04.	‘14.01.04.	10,130,000	1	‘14. 01.23.	‘14.02.04.	9,552,400	물량변경	서대문구청 교통행정과 (송유진, 330-1835)
2013 교통사고 잦은곳 개선공사 (연간단가)	㈜우성 산업공사	‘13.09.09	‘13.12.26	53,667,800	1	‘14. 02.28	‘14.02.21	46,543,980	물량변경	성동구청 교통행정과 (이승면, 2286-5685)
2013년 교통사고잦은곳 개선공사	이글 엔지니어링	‘13.11.08	‘14.01.06	77,787,100	2	‘14. 04.24	‘14.04.30	132,900,000	물량증가 (어린이보호구역 예산포함 26,253,260원)	강동구청 교통행정과 (이병철, 3425-5072)
영등포 로터리 교통소통 개선 및 횡단보도 확충사업 (토목공사)	㈜태지종합건설	‘13.09.27	‘13.12.13	66,663,610	1	‘13. 12.12	‘13.12.13	71,918,000	물량변경	영등포구청 교통행정과 (박석범 ,2670-3888)
당산중앞 교차로 교통소통 개선사업(토목공사)	㈜동서토건	‘13.10.10	‘13.12.14	29,612,450	1	‘13. 12.12	‘13.12.14	46,244,000	물량변경	영등포구청 교통행정과 (박석범 ,2670-3888)
교통사고 잦은곳 개선사업(토목공사)	㈜고황건설	‘13.10.10	‘13.12.13	49,534,800	1	‘13. 12.12	‘13.12.13	58,197,000	물량변경	영등포구청 교통행정과 (박석범 ,2670-3888)
교통신호기 유지보수공사 (연간단가 1구역)	한국신호㈜	‘13.03.22	‘14.02.28	399,252,229	3	‘14. 02.18	‘14.02.28	558,360,000	물량증감	동부도로사업소 기전과 (이귀섭 2040-0361)
교통신호기 유지보수공사 (연간단가 2구역)	장한전산㈜	‘13.03.22	‘14.02.28	399,748,890	3	‘14. 02.19	‘14.02.28	614,746,000	물량증감	동부도로사업소 기전과 (이귀섭 2040-0361)
교통신호기신설및보수공사 (연간단가 -1지역)	㈜해성기전	‘13.03.20	‘14.02.25	478,668,070	2	‘14. 2.25	‘14.02.25	516,351,000	물량증가	서부도로사업소 기전과 (호정오, 300-8395)
교통신호기신설및보수공사 (연간단가 -2지역)	성산전설㈜	‘13.03.20	‘14.02.25	476,171,949	2	‘14. 02.25	‘14.02.25	685,916,000	물량증가	서부도로사업소 기전과 (호정오, 300-8395)
교통신호기 보수공사 (연간단가)	엘티스㈜	‘13.07.22	‘14.02.25	289,033,291	2	‘14. 02.25	‘14.02.25	397,001,000	물량증가	서부도로사업소 기전과 (호정오, 300-8395)
교통신호기 보수공사 (연간1구역)	㈜대금 이앤아이	‘13.03.19	‘14.02.28	402,943,100	2	‘14. 02.18	‘14.02.28	687,446,000	물량증가	남부도로사업소 기전과 (허송욱, 3284-5432)
교통신호기 보수공사 (연간2구역)	에스에스 이엔아이㈜	‘13.03.19	‘14.02.28	399,385,330	5	‘14. 02.18	‘14.02.28	469,230,000	물량증가	남부도로사업소 기전과 (허송욱, 3284-5432)
교통신호기 유지보수공사 (연간1구역)	자유전설㈜	‘13.04.09	‘14.02.28	408,399,900	3	‘14. 02.22	‘14.02.28	550,960,000	물량증감	북부도로사업소 기전과 (백윤광, 944-5473)
2013년 교통신호기신설및개량공사 (연간단가)	㈜조일 이씨에스	‘13.04.09	‘14.02.28	300,310,150	1	‘13. 09.12	‘14.02.26	400,000,000	물량증감	북부도로사업소 기전과 (박정민, 944-5476)
교통신호기 유지보수공사 (연간1구역)	주식회사 영진전력	‘13.03.05	‘14.02.28	252,858,609	2	‘14. 02.12	‘14.02.28	310,000,000	물량증가	성동도로사업소 기전과 (채희준, 2210-1543)
교통신호기 유지보수공사 (연간2구역)	신신전기㈜	‘13.03.05	‘14.02.28	249,230,629	3	‘14. 02.12	‘14.02.28	409,968,000	물량증가	성동도로사업소 기전과 (채희준, 2210-1543)
교통신호기 신설 및 개량 공사 (연간단가)	㈜위앤기전	‘13.03.05	‘14.02.28	250,190,537	2	‘13. 12.16	‘14.02.28	325,000,000	물량증가	성동도로사업소 기전과 (채희준, 2210-1543)
교통신호기 유지보수 (강서,영등포일부)	㈜성지수전	‘13.03.13	‘14.02.28	324,074,770	2	‘14. 02.20	‘14.02.28	401,578,940	계약물량 변경 및 4대보험 정산	강서도로사업소 기전과 (박태진, 2657-7964)
교통신호기 유지보수 연간단가 공사 (구로,양천)	이성전기 ㈜	‘13.03.08	‘14.02.28	349,467,580	2	‘14. 02.12	‘14.02.28	438,000,000	계약물량 변경 및 4대보험 정산	강서도로사업소 기전과 (박태진, 2657-7964)
교통신호기 신설 및 개량공사	㈜조일이씨에스	‘13.03.14	‘14.02.28	342,884,560	2	‘14. 02.20	‘14.02.28	450,024,160	계약물량 변경 및 4대보험 정산	강서도로사업소 기전과 (박태진, 2657-7964)
군자교 외 2개소 도시고속도로 기능개선공사	㈜건원건설	‘13.06.20	‘13.12.31.	375,388,650	1	‘13. 12.24.	‘13.12.31	359,500,000	물량증감	성동도로사업소 도로보수과 (최영서2210-1533)
당산중앞 교차로 교통소통 개선사업 (토목공사)	㈜동서토건	‘13..10.10	‘13..12.14	29,612,450	1	‘13.. 12.12	‘13..12.14	46,244,000	물량변경	영등포구청 교통행정과 (박석범,2670-3888)
율곡로(충신시장입구) 교통소통 개선사업	한국일림건설㈜	‘13.06.25	‘13.12.23	154,555,200	1	‘13. 10.25	‘13.12.23	166,300,000	물량 증가	종로구청 교통행정과 (김지하2148-3273)
2013년 도로교통 소통개선 교통신호기 공사	㈜한얼엔지니어링	‘13.06.27	‘13.09.30	27,650,350	1	‘13. 8.16	‘13.09.30	32,250,000	물량증가	남부도로사업소 기전과 (허송욱3284-5432)
강북구 교통소통 개 선공사 (토목공사)	한맥종합건설㈜	‘13.09.10	‘13.12.10	6,305,000	1	‘13. 11.6	‘13.12.10	2,977,000	물량변경	강북구청 교통행정과 (최영덕901-5924)
2013년 도로교통 소통개선 교통신호기 공사	삼성종합전기	‘13..07.31	‘13..12.31	217,757,240	1	‘13.. 12.23	‘13..12.31	192,100,000	계약물량 변경 및 4대보험 정산	강서도로사업소 기전과 (박태진2657-7964)
2013년 도로교통소통 개선사업 교통신호기 공사(2차)	㈜태정전기소방	‘13..09.10	‘13..12.10	40,826,800	1	‘13.. 12.06	‘13..12.10	37,302,100	계약물량 변경 및 보험료 정산	강서도로사업소 기전과 (양상규2657-7969)
2013도로교통 소통개선사업(토목-퇴계로5가 교차로)	비케이토건	‘13.07.01	‘13.10.31	30,465,450	1	‘13. 10.30	‘13.10.31	35,700,000	물량 변경	중구 교통행정과 (정종광3396-6212)
2013도로교통 소통개선사업(차선도색--퇴계로5가 교차로)	로드비아	‘13.10.04	‘13.11.03	642,000	1	‘13. 12.20	‘13.10.31	619,000	보험료 정산	중구 교통행정과 (정종광, 3396-6212)
2013년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사	유유전기	‘13.09.11	‘14.02.26	83,781,161	1	‘14. 2.25	‘14.02.26	66,011,000	물량감소 (중암교 취소)	서부도로사업소 기전과 (호정오300-8395)
교통소통개선 교통신호기공사	㈜신보기전	‘13.07.16	‘13.12.31	68,091,000	1	‘13. 12.19	‘13.12.31	68,805,000	물량변경	성동도로사업소 기전과 (채희준2210-1543)
교통소통개선 통신호기공사 (3)	주식회사 케이이씨암코	‘13.11.07	‘14.02.28	118,309,550	1	‘13. 12.20	‘14.02.28	119,541,000	물량변경	성동도로사업소 기전과 (채희준2210-1543)
대한민국역사박물관 옆 회전교차로 설치공사	㈜위드건설산업	‘13.07.05	‘13.12.31	175,‘962,170	1	‘13 12.18	‘13.12.31	263,065,000	물량 증가	종로구청 교통행정과 (김지하2148-3273)
초롱타운아파트앞회전교차로설치공사(교통시설)	유니온내화단열	‘13.09.11	‘13.12.11	18,028,520	1	‘13. 12.11	‘13.12.11	19,714,000	물량 증가	구로구청 교통행정과 (차양호860-3206)
초롱타운아파트앞회전교차로설치공사(토목)	스탠다드건설	‘13.08.22	‘13.11.24	84,477,000	1	‘13. 11.15	‘13.11.18	123,552,000	물량 증가	구로구청 도로과 (김남경860-3140)
2013년 회전교차로 설치 교통신호기 공사	이성전기(주)	‘13..09.28	‘13..12.23	6,759,000	1	‘13..12.18	‘13..12.23	4,700,000	물량 변경 및 4대보험 정산	강서도로사업소 기전과 (박태진2657-7964)
2013년 회전교차로 설치 교통신호기 공사	이성전기㈜	‘13..09.28	‘13..12.23	6,759,000	1	‘13.. 12.18	‘13..12.23	4,700,000	물량 변경 및 4대보험 정산	강서도로사업소 기전과 (박태진2657-7964)
초롱타운아파트앞회전교차로설치공사(교통시설)	유니온내화단열	‘13.09.11	‘13.12.11	18,028,520	1	‘13. 12.11	‘13.12.11	19,714,000	물량 증가	구로구청 교통행정과 (차양호, 860-3206)
초롱타운아파트앞회전교차로설치공사(토목)	스탠다드 건설	‘13.08.22	‘13.11.24	84,477,000	1	‘13. 11.15	‘13.11.18	123,552,000	물량 증가	구로구청 도로과 (김남경, 860-3140)
영등포 로터리 교통소통 개선 및 횡단보도 확충사업	㈜태지종합건설	‘13..09.27	‘13..12.13	66,663,610	1	‘13.. 12.12	‘13..12.13	71,918,000	물량변경	영등포구청 교통행정과 (박석범2670-3888)
안국역교차로 횡단보도 확충공사	두광건설㈜	‘13.11.11	‘14.01.09	19,300,000	1	‘13. 12.24	‘14.01.09	15,900,000	물량 감소	종로구청 교통행정과 (김지하2148-3273)
2013 횡단보도 확충정비 교통신호기 공사	㈜다해산업개발	‘13.06.17	‘13.08.30	31,468,580	1	‘13. 08.20	‘13.08.30	30‘650’000	물량 감소	남부도로사업소 기전과 (허송욱3284-5432)
2013년 횡단보도 확충정비 사업 교통신호기 공사	서울전력㈜	‘13..10.14	‘14.01.25	35,757,821	1	‘13.. 12.22	‘14.01.25	34,902,550	보험료정산	강서도로사업소 기전과 (양상규2657-7969)
2013횡단보도 확충사업 (토목-중림동 교차로)	영재토건	‘13.09.24	‘13.12.26	23,192,000	1	‘13. 12.20	‘13.12.23	28,900,000	물량 변경	중구 교통행정과 (정종광, 3396-6212)
2013횡단보도 확충사업 (중림동 교차로)	로드비아	‘13.09.23	‘14.02.28	11,686,000	1	‘13. 12.20	‘14.02.21	11,272,000	보험료 정산	중구 교통행정과 (정종광, 3396-6212)
2013횡단보도 확충사업 (토목-청계4가 교차로	은서종합건설	‘13.10.08	‘13.12.31	16,803,000	1	‘13. 12.20	‘13.12.23	16,940,000	물량 변경	중구 교통행정과 (정종광, 3396-6212)
2013횡단보도 확충사업 (차선도색-청계4가 교차로	로드비아	‘13.10.08	‘13.12.31	1,870,000	1	‘13. 12.20	‘13.12.30	1,810,000	보험료 정산	중구 교통행정과 (정종광, 3396-6212)
2013년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사	태화전기건설공사	‘13.09.16	‘14.02.26	85,150,638	1	‘14. 2.25	‘14.02.26	81,257,000	물량감소	서부도로사업소 기전과 (호정오300-8395)
횡단보도이설 교통신호기공사	㈜남양계전	‘13.10.02	‘13.12.31	127,428,950	1	‘13. 12.19	‘13.12.31	130,570,000	물량변경	성동도로사업소 기전과 (채희준2210-1543)
횡단보도 확충정비 교통신호기공사	㈜현화	‘13.08.19	‘13.12.31	53,725,200	1	‘13. 12.13	‘13.12.31	61,512,000	물량변경	성동도로사업소 기전과 (차준원2210-1541)