문서번호	교통운영과-21994
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
협조
	주무관

`13년 교통소통개선 및 횡단보도 확충사업

설계용역 설계변경 보고

2014. 11.

도시교통본부

교통운영과

-`13년 교통소통개선 및 횡단보도 확충사업-

설계 용역 설계변경 보고

2013년 교통소통개선 및 횡단보도 확충사업 설계 용역(강남)의 설계 지점수 변동에 따른 설계변경(정산) 보고임.

용역 개요

용 역 명 : 교통소통개선 및 횡단보도 확충사업 설계용역(강남)

도 급 자 : ㈜ 도화엔지니어링   대표 박 승 우

계약기간 : ‘13.3.12 ~ ’14.11.28

계약금액 : 일억육천구백칠십구만원정(￦169,790,000)

설계변경 내용

계약금액 변경 : 기본설계, 실시설계 지점 변경에 따른 금액 정산

- 당  초 : 기본설계 39개소, 실시설계 39개소, 모니터링 10개소

- 변  경 : 기본설계 53개소, 실시설계 23개소, 모니터링 10개소

설계변경 내역

(단위:원)

지 역	당 초	변 경	증 감	비 고
강 남	169,790,000	152,800,000	감)16,990,000

조치 계획

상기 사항에 대해 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

따로붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.