‘걷는 도시, 서울’ 주요사업 현황

사업명	사업개요	추진실적
이면도로 제한속도 하향 전면 추진	✜ 도로별 지정 속도제한을 이면도로 전체 30㎞/h로 단순화 ✜ 시 전체 이면도로 및 간선도로 제한속도 하향 단계적 추진	✜ ’16.1~3 : 경찰청, 서울경찰청, 서울연구원 추진방향 협의 ✜ ’16.2~5 : 서울연구원 정책연구 ✜ ’16.4~6 : 도심지역 시범설계 및 교통안전시설 설치안 검토 - 북촌, 시경 주변 ✜ ’16.6.28 : 시범사업 지역 교통안전시설 심의(서울경찰청) ✜ ’16.7.22~ : 시범사업 지역 교통안전시설 설치 ※ ’16.7.20 : 시범사업 추진 관련 언론 자료 제공 ✜ ’16.7~11 : 모니터링 시행(속도조사 등) ✜ ’17.1~6 : 2차 시범사업 추진 협의(시경, 구청 등) ✜ ’17.8~9 : 2차 시범사업 사전 모니터링 및 공사시행
보행환경개선지구 25개 자치구 확대 시행	✜ 대 상 지 : 자치구(국가) 공모 후 선정위원회를 통해 선정 ․개선내용, 추진의지, 사업시행효과, 재원조달 방안 등 평가 ✜ 사업내용 : 사업지구 특성별 보행환경 ‘종합적’ 개선 ․보도 확장, 차량통행제한, 보행지장물 정비, 안내체계 정비 등	✜ ’17. 1 : 자치구 공모 접수(20개소 신청) ✜ ’17. 2 : 사업대상지 선정(4개소) ✜ ’17. 3 : 보행환경개선지구 지정 고시 ✜ ’17. 3~9 : 사업지별 기본 및 실시설계 실시 ✜ ’17. 10~12 : 공사 시행
보도 상 보행지장 시설물 관리개선	✜ 시민통행 불편을 초래 중인 한전 지상기기에 대하여 정비 ✜ 이용도가 떨어지는 공중전화부스에 대하여 안심 및 폴형 부스 정비	✜ ‘17. 10 : 한전지상기기 이설 및 철거 12개소, 미관개선 46개소 ✜ ‘17. 10 : 공중전화부스 철거 190실
서울형 가로설계 및 관리 매뉴얼 개발 적용	✜ ‘걷는도시, 서울’, ‘완전가로’ 구현을 위한 지침서 마련 ✜ 가로 정비 목표 및 가로유형별 설계 가이드라인 작성	✜ 가로 설계 및 관리 매뉴얼 기본방향 연구 완료(`15. 4.) ✜ 3가지의 가로설계 및 관리 목표 설정 ✜ 가로특성 반영을 위한 새로운 가로분류 체계 정립, 각종 설계지침 작성 ✜ 매뉴얼 개발 및 배포 완료(’17.2)
비규격 볼라드 일제정비	✜ 서울시내 공공보도 볼라드 전수조사 - 공공보도 : 서울시 교통운영과, 자치구 ✜ 비규격 및 부적정 볼라드 일제정비	✜ 서울시내 볼라드 전수조사 실시‘16.1.4~2.29(2개월) - 11,084개소 부적합 볼라드 적출 ✜ 볼라드 정비추진(‘17.7월 기준) - 부적합 볼라드 정비 : 6,294개 정비
건축선 후퇴부분내 볼라드 일제 정비 계획	✜ 정비대상 : 사유지 “건축선 후퇴부분”내 설치된 부적합, 불량 볼라드 ✜ 정비내용 - 볼라드 위치, 간격, 재질, 높이, 점형블럭 설치여부 등 ✜ 정비방법 - 건물주, 관리인 등 관계자 자진정비 유도+ 홍보 등 - 자치구 관련부서(건축,도로,교통부서 등) 협력정비	✜ 정비대상 1,494개중 370개 정비 완료 - 2개구(용산구, 강남구) 정비완료 - 도심부(종로, 중구) 주요 간선도로 내 2개노선 정비 완료
골몰길 재구조화, 보행자 우선도로 확대	✜ 대상지 : 보·차도 구분이 없는 생활권 이면도로 18개소 ✜ 사업내용 - 보·차도간 일체형 패턴을 사용하여 도로 전체를 이용할 수 있게 개선 - 고비용 물리적 개선 보다는 제한속도 하향 등 저비용 운영개선 사업 확대	✜ ’17. 1.11 : ’17년 보행자우선도로 사업 추진계획 수립 ✜ ’17. 2.28 : 사업대상지 선정(31개소 자치구 공모대상 중 18개소 선정) ✜ ’17. 3.13~ : 자치구별 설계시행 ✜ ’17. 6. 2 : 자치구 설계(안) 최종 심의 ✜ ’17. 6.23~ : 자치구별 공사시행
보행자 교통사고 다발지점 개선	✜ 교통사고 발생지점 도로 및 교통안전시설 보강 ✜ 여의교오거리 등 24개소 개선, 삼양입구사거리등 17개소 설계 중	✜ `16.1 : 실시설계용역 및 관계기관 협의 ✜ `16.3 : 예산 재배정(각 구청 및 사업소 등) ✜ `16.4 : 공사발주 및 착공 ✜ `16.4~12 : 여의교 오거리 등 24개 지점 공사완료 ✜ `17.3~11 : 영등포 교차로등 22개 지점 공사추진
황단보도 보행신호 본격개선	✜ 보행자를 배려한 과학적이고 안전한 신호체계로 전환 - 횡단보도 대기시간 단축, 보행신호 연장, 보행신호 전(全) 시간부여 등 보행자의 안전과 편의를 최우선으로 하는 교통신호 시스템 운영	✜ 2016. 1 ~ : 개선 필요 교차로 수시 신호체계 개선 ✜ 2016. 2 ~ : 횡단보도 보행편익 신호기법 발굴 ✜ 2016. 3 ~ : 횡단보도 전수조사 내용에 따라 보행신호 개선 ✜ 2016. 7 ~ : 보행신호 본격개선 진행 중 - 2016년 1,507개소 개선 - 2017년 9월 기준 614개소 개선 진행
도심권 전체교차로 모든 방향 횡단보도 설치	✜ ‘ㅁ’자형 횡단보도 교차로로 개선 및 횡단보도 확대 설치 ✜ 도심권 횡단보도 32개소 설치(’16년 20개소, ’17년 12개소)	✜ 도심권 교차로 횡단보도 설치현황 전수조사 : ’15.10.~12. ✜ 일괄 교통안전시설 협의 및 심의 : ’16.2.~4. ✜ 교통안전시설 심의가결지점 실시설계(17개소) : ’16.5.~7. ✜ 횡단보도 설치 유관기관 현장합동조사 : ’16.7. ✜ 횡단보도 설치사업 시행 : ’16.8.~ ’17.10. - 공사완료 : 시청 옆, 환구단 앞 등 24개소 - 공사예정 : 종로구청 입구 등 8개소
보행단절구간 전수조사 및 개선	✜ 시 전역의 보행단절 구간 전수조사 및 개선 추진 ․횡단보도 미설치, 보도단절, 장거리 우회 등 개선	✜ 2016. 4 ~ 5 : 자치구별 단절구간 조사 시행 ✜ 2016. 6 ~ 10 : 자치구 조사자료를 바탕으로 한 보완조사 시행 (서울시 보행교통 개선계획 수립 시 병행) ✜ 2016.10 ~ 12 : 단절구간 개선물량 산출 - 횡단보도 미설치(2,400개소), 보도끊김(3,828개소), 턱낮춤(18개소) 등 ※ 해당 지역별 보행환경 개선사업 시행 시 개선 조치
세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 사업	✜ 위치 : 중구 태평로1가 60-6외 5필지 ✜ 규모 : 지상1층/지하3층, 연면적 2,998.23㎡ ✜ 사업내용 : 광장, 문화 및 집회시설 (서울도시건축박물관) - 지 상 부 : 역사문화광장 조성(1,088㎡) - 지하공간 : 기존 덕수궁 지하보도와 연결하여 시민청․시청역과 연계한 특화공간으로 조성 (1,600㎡)	✜ 조성공사 착공(’16.10.26) - ’17. 10월 현재 터파기 및 흙막이 가시설 공사 중 ✜ 운영주체 및 용도 확정(’16. 6) - 운영주체 : 도시공간개선단 - 용 도 : 도시건축박물관 ✜ 성공회성당과 통합광장 조성 협약 체결(’17. 1) ✜ 전시콘텐츠 기획 및 세부운영계획 용역 시행 - 용역기간 : ’16. 12 ~ ’17. 11 ✜ 문화재 정밀발굴 조사(’16.4) 및 유구 발굴(’16.9) - 발굴 유구 : 수혈 1기, 적심 1기, 입사지정 2기
세운상가군 재생사업	✜ 1단계 구간 : 종묘~초록띠공원∼ 세운상가군(세운․청계․대림) ✜ 2단계 구간 : 세운상가군 (삼풍․PJ․인현․진양)~남산 ✜ 사업내용 - (보행재생) 종묘 ~ 남산을 연결하는 보행네트워크 단계별 구축 - (산업재생) 도심 창의제조산업으로의 거점공간 운영 - (공동체 재생) 주민 주도 재생 기반 마련	✜ ’16. 1.28. : 다시․세운프로젝트사업 착수 발표 ✜ 1단계 구간 공공공간 조성공사 준공(’17.9) ✜ 2단계 구간 공공공간 기본 및 실시설계 용역 진행중
퇴계로 도로공간 재편	✜ 위치 : 회현역~퇴계로2가(남산예장자락 입구) ✜ 규모 : 왕복 6~12차로, 연장 1.1km ✜ 사업구간 : 중점구간(회현역5번~회현역7번출구), 잔여구간(회현역7번~퇴계로2가) ✜ 사업기간 : ’15.10 ~ ’17.11월 ✜ 사업내용 : 차로축소를 통한 보행공간 확충, 조업정차공간 조성 등	✜ 기본 및 실시설계용역 착수 : ’15.10월 ✜ 차로조정방안 협의 및 심의 추진 : ’16.1~7월 ✜ 서울경찰청 교통안전시설심의 개최 : ’16.8.10. ✜ 주민의견 수렴, 주민설명회 개최 : ’16.1~’17.4월 ✜ 중점구간(회현역5번~회현역7번출구) 공사착수 및 완료 : ’17.2.~5월(※서울로 7017개장과 연계완료) ✜ 잔여구간(회현역7번~퇴계로2가) 공사 중 : ’17.10월
만리재로 보행환경 개선사업	✜ 서울역고가 보행길과 연계하여 차로축소, 교차로 개선, 보도정비 등을 통한 보행환경 개선과 사람 중심의 쾌적한 공간 조성	✜ ‘17.01.04. : 공사 착공 ✜ ‘17.02.27. : 감리 착공 ✜ ‘17.07.31. : 만리재로 (만리2구역~한겨례)공사완료 ✜ ‘17.10. : 만리재로 (한겨례~공덕오거리)공사 중
생활권 도로다이어트	✜ 위 치 : 성동구 성수이로7길 [B=8.5~12.0m, L=320m] ✜ 주요내용 : 보도신설, 교통안전시설 설치, 신호운영개선 등	✜ 시범사업 사업지 공모 : ’16. 7. 29. ~ ’16. 8. 10. ✜ 사업지 선정회의(성동구 성수이로7길 선정) : ’16.9.2. ✜ 성동구 성수이로7길 설계용역 완료 : ’16.10. ✜ 성동구 성수이로7길 공사 완료 : ’16.12. ✜ ’16년 전체 19개 자치구 20개소 중, 19개소 완료 ✜ ’17년 전체 14개 자치구 14개소 중, 14개소 추진중
종로 도로공간 재편 및 중앙버스전용차로 설치	✜ 사업구간 : 종로(서대문역~흥인지문), ✜ 사업내용 : 중앙버스전용차로(2.8km) 및 자전거도로 설치, 보행친화공간 조성 등 ✜ 사업기간 : 2015.12 ~ 2017.12	✜ ’16.01 중앙버스전용차로 설계용역 착수 ✜ ’16.01~08 새문안로(서대문역~세종대로사거리) 기본설계 완료 ✜ ’16.10 새문안로 공사 시행 요청(→도시기반시설본부) ✜ ’16.01~10 종로 도로공간재편 기본설계(안) 작성 ✜ ’16.10 투자심사(사업비 160억원→315억원, 재검토) ✜ ’17.02 새문안로 공사 착공 ✜ ’17.03 투자심사(사업비 변경 160억원→244억원) ✜ ’17.04 새문안로 중앙버스전용차로 개통 ✜ ’17.04 주민설명회 및 문화재현상변경심의 ✜ ’17.04 종로BRT 도로공간재편 교통안전시설심의 ✜ ’17.07 종로BRT 도로공간재편 공사 시행 요청 ✜ ’17.09 종로BRT 도로공간재편 공사 착공
시민 이동성 케어센터	✜ 모든 시민이 편리하게 이용할 수 있는 보행서비스(On-Line) 기반조성 ✜ 교통약자를 위한 콜 상담(Off-Line) 기반 서비스 운영	✜ 시민이동성케어센터 운영을 위한 정보화 전략계획(ISP) 수립 : ‘16. 2 - 보행정보 DB구축 및 정보제공 서비스 전략 수립 ✜ 보행사고정보 제공 서비스 구축 및 운영 : ‘16. 7 ~ 12 - 보행사고 유형별 발생 다발지역 홈페이지(TOPIS)에 서비스
걷자 페스티벌 등 시민참여 이벤트 다양화	✜ 서울울 걷·자 페스티벌 개최 ✜ 걷기 좋은 서울 시민공모전 개최 등	✜ 2013 서울 걷·자 페스티벌 개최 (1회) : ’13.9.23 - 7,000명 참여 (걷기 6,000명/ 자전거 1,000명) ✜ 2014 서울 걷·자 페스티벌 개최 (2회) : ’14.11.2 - 8,000명 참여 (걷기 6,000명/ 자전거 2,000명) ✜ 2015 서울 걷·자 페스티벌 개최 (3회) : ’15.10.4 - 15,000명 참여 (걷기 11,000명/ 자전거 4,000명) ✜ 2016 서울 걷·자 페스티벌 개최 (4회) : ’16.10.30 - 12,000명 참여 (걷기 8,500명/ 자전거 3,500명) ✜ 2017 서울 걷·자 페스티벌 개최 (5회) : ’17.9.27 - 14,000명 참여 (걷기 10,000명/ 자전거 4,000명)
DDP, 잠수교, 광진교 등 보행전용거리 확대	✜ 도심 및 생활권 보행전용거리 운영 ✜ 시민이 즐길수 있는 거리 문화공간으로 개발‧운영	✜ 시 직영 보행전용거리 세종대로, DDP, 덕수궁길, 청계천로 (4개소) ✜ 자치구 운영 보행전용거리 인사동길, 연세로, 명동길 등 (103개소)
도심보행길 조성	✜ 4대문안 명소와 보행길 연계, 네트워크 개발(5개 노선 25.4㎞) ✜ 스토리텔링 및 안내체계 개선 ․도심내 역사‧문화, 관광자원 활용 및 안내표지 개선	✜ ’16.4 : 도심보행길 조성계획 수립‧발표 □노선별 네이밍, 대표색, 스토리텔링, 보도지장물 정비 방안 등 ✜ ’16.8 : 이음길 상부구간 조성 공사 완료 ✜ ’16.9 : 잔여 4개 노선 스토리텔링 용역 발주 ✜ ’17.7 : 용역 완료 및 공사 진행중
덕수궁 돌담길 회복	✜ 130여년간 단절된 덕수궁 돌담길 회복 ✜ 보행로 조성 폭 4~6m, 연장 170m	✜ '14.10월 : 영국대사관에 사업 제안 ✜ '15.5.14 : 서울시‧영국외무부 간 돌담길 회복사업 추진 MOU 체결 ✜ '15.5~'16.10 : 영국대사관과 보행로 조성 방안 협의 ✜ '16.10 : 영국대사관과 시소유 100m 우선 개방 합의 ✜ '17.4.~8 : 공사시행 ✜ '17.8.30 : 공사완료 및 시민개방 ✜ 영국 소유 70m는 장기적으로 협의 추진
서울 두드림길 확대 조성	✜ 바닥정비, 안내판 설치 등 서울둘레길 유지관리를 통한 걷기코스 내실화 ✜ 무장애 숲길, 테마산책로 등 생태, 역사, 문화 도보길 확대 조성	✜ 서울의 대표 걷기코스인 ‘ 서울두드림길’ 내실화 및 확대 - 기존 ‘서울두드림길’ 유지관리를 통한 걷기코스 내실화 - 테마 산책길, 무장애 숲길 등 걷기코스 확대 ✜ 홈페이지 안내 및 프로그램 제공을 통한 걷기 활성화 - 길 통합 홈페이지 ‘서울 두드림길’, 걷기코스 및 정보 제공 ⇨ 계속 - 시민참여 확대 및 이용 활성화를 위한 서울둘레길 프로그램 운영 - 아카데미, 체험후기, 사진공모전 등 이벤트 참여를 통한 활성화 ⇨ 계속
지역중심 대표보행거리 확산	✜ 대상지 : 성북로, 한양대 주변, 석촌호수길 ※ ’17년 신규 사업지 구로 공원로 선정 ✜ 도로다이어트 등 보‧차도 공간 및 교통운영 개선 ✜ 보행전용거리 행사 등 보행우선 환경 조성	✜ ’15. 9. : 지역중심 대표보행거리 조성계획 수립 ✜ ’15.12. : 자치구 공모에 의한 사업대상지 선정 ✜ ’16. 1~10월 : 설계, 주민설명회, 관계기관 협의 등 ✜ 대상지별 진행현황 - 한양대 주변 : 공사완료(7월) - 석촌호수길 : 공사완료(9월) - 성북로 : 공사중(11월) - 공원로 : 설계중(12월)
광화문 광장 공간재편	✜ 국가중심축 조성 및 광화문일대 역사성 회복 ✜ 시민이 누리는 행복한 문화공간 조성 ✜ 보행과 사람 중심의 공간 조성	✜ ’16.9~‘17.6 : 광화문포럼 구성 및 운영(10차) ✜ ’17. 5.20 : 시민참여단 100명 의견수렴 ✜ ’17. 5.31 : 대시민토론회를 통한 포럼결과 발표 ✜ ’17. 8.24 : 광화문광장 종합기본계획 용역 착수 (기간 : ‘17. 8 ~’18. 2)
서울로 7017 프로젝트	✜ 위 치 : 서울시 중구 남대문로5가 527~ 만리동1가 62 ✜ 규 모 : 폭 10.3m, 연장 1,024m, 높이 17m (’70년 준공 : 46년 경과) ✜ 사업내용 : - 바닥판 교체, 구조물 보수·보강 등 안전 보강 - 시․종점부 및 교량연결, 조경 식재, 편의시설 설치 등 보행로 조성	✜ ’15. 1. 29.서울역 7017 프로젝트 발표 ✜ ’15. 7~’16. 8. 기본 및 실시설계용역 시행 ✜ ’15.11~12 관계기간 협의절차 이행(국토교통부, 서울지방경찰청, 문화재청 등) ✜ ’15.12.13 : 서울역 고가도로 통행금지 ✜ 서울역 7017 프로젝트 기본 및 실시설계(’15.7.1~’16.10.31) ✜ 서울역고가 PC 바닥판 및 받침장치 설치, 기둥 단면보강 완료(’16.12.) ✜ 서울로 조성 조경, 건축, 설비공사 완료(’17.4) ✜ 서울로 7017 개장(’17.5.20) ✜ 서울로 방문객 500만 돌파(’17.10.2)
남산 예장자락 재생사업 추진	✜ 교통방송 등 기존 건물 철거 후 공원으로 회복 ✜ 도심내 부족한 관광버스 주차장(약 39면) ✜ 남산 접근성 향상을 위한 교통체계 개편	✜ ’14. 9.23.: 주차난 완화 및 주차문화 발전방안 발표(국토부) ✜ ’16. 2.19.: 설계공모 당선작 선정 ✜ ’16. 4. 8.: 기본 및 실시설계 계약 및 착수 ✜ ’16. 8.15.: 착공행사 개최 ✜ ’16.10.14.: 기존 공공청사 철거 완료 ✜ ’16.12. 8.: 도시계획시설(광장, 주차장, 도로, 공공청사 등) 결정 고시 ✜ ’17. 4. 3.: 실시설계 완료 ✜ ’17. 8.31.: 공사착공
옐로카펫 확대 설치	✜ 사업내용 : 횡단보도 대기공간(보도)에 옐로카펫 설치로 시인성 향상 ✜ 설치계획 : 100개소 설치(예산 30개소, 후원 70개소)	✜ ’15년 시범설치 – 18개소(중구14, 성북4) ✜ 협업체계 정립을 위한 협약(MOU) 체결 : 서울시/국제아동인권센터 - ’15.12월 ✜ ‘옐로카펫’ 설치 후원 협약(‘16.7월) ✜ 옐로카펫 89개소 설치 완료(‘16.12월) ✜ 옐로카펫 대상지 선정 및 100개소 설치중(’17.10)
교통약자를 위한 장애물 없는 보행환경 조성	✜ 대상지 : 서울정문학교 일대(관악), 성동노인복지관 일대(성동) ✜ 사업내용 - 휠체어․유모차 이용자 : 유효보도폭 확보, 보도 단차 개선, 지장물 제거 등 - 장애인 : 보행안전시설물(점자블록, 음향신호기, 볼라드 등) 설치 등 - 고령자, 어린이 등 : 횡단보도 설치, 보도 재질 및 보차도 단차 개선 등	✜ ’16. 1 : 사업대상지 선정(2개소) ✜ ’16. 1.29 : 사업계획 수립 ✜ ’16. 4.12.~8.12 : 기본 및 실시설계 진행 ✜ ’16. 8.10 : 교통안전시설 규제심의(가결) ✜ ’16. 12~ : 2개소 공사완료
점자블록 전수조사 및 정비	✜ 보도상 장애인 안전시설 정비사업 추진 - 시각장애인들에 대한 안전한 보행환경 조성을 위한 점자블록 정비	✜ ‘16. 8월~11월 : 공사 추진 - 도심지 내 4개 區 (종로,중구,동대문,서대문) 세종대로 등 725개소 정비완료 ✜ ‘17. 7월~11월 : 공사 추진 중 (총 1,813개소) - 도심지 외 21개 區 (‘16년 사업지 제외) 강남대로 등 850개소 정비완료(47%)
노인, 장애인 보호구역 개선	✜ 사업대상 : 중구 신일경로당 등 18개소 ✜ 사업내용 : 노인·장애인 보호구역 지정 및 교통안전시설 개선 - 안내표지, 유색포장, 과속방지시설 등 개선	✜ 노인장애인 보호구역 지정 계획 수립(’17.1.13.) ✜ 보호구역 현장조사 및 기본설계(’17.2~4월) ✜ 관계기관 협의 및 경찰청 규제심의(’17.5~8월) ✜ 노인보호구역 지정완료 및 개선공사 추진중(18개소) ※ ’16.12월말 기준 노인 보호구역 102개소, 장애인 보호구역 5개소 지정완료
어린이 교통사고 제로화	✜ 어린이 안전사고 예방을 위한 보호구역 확대 및 안전시설물 개선 ✜ 등·하교 교통안전지도사, 시간제 차량통행제한 등 운영	✜ 어린이보호구역 개선 27개소, 과속경보 표지판 12개소 설치 ✜ 아마존 3개소, CCTV 39개소 설치 중(어린이 보호구역내 99.9% 설치완료) ✜ 교통안전지도사 427명 활동중, 시간제 차량통행제한 98개소 운영 중
연령대별 맞춤형 보행안전 교육	✜ 초등학교 학년별 수업용 맞춤형 안전교육 콘텐츠 개발 ✜ 수혜자 중심의 찾아가는 교육 실시 - 어르신 밀집시설(복지관, 노인정, 경로당 등) 교통안전 교육교실 운영 - 미취학 아동 대상 유치원, 어린이집 방문 교육 시행	✜ 초등1~2학년 / 3~4학년 맞춤형 교통안전 교육 교재 제작 배포(‘15.8월/ 16.11월) ✜ 미취학 아동 대상 교통안전 뮤지컬 실시(‘16.4~11월) ✜ 미취학 아동대상 어린이집 찾아가는 교통안전 교육 실시(‘16.6~12월, 45개소 3,243명) ✜ 어르신 밀집시설(경로당, 노인정, 어르신복지관 등) 방문 교통안전 교육 실시(9,915명, 2016년) ✜ 어린이 교통사고 예방 프그램 운영(2017.5~11월) ✜ 초등 5~6학년 맞춤형 교통안전 교육프로그램 개발(9차시, 2017.8월)
보행분야 LOUD 프로젝트 추진	✜ 교통안전 시설물에 다양한 행동유도 디자인 접목 - 과도한 시설물 대신 시민에게 직접적인 메시지를 줄 수 있는 디자인으로 안전한 교통문화 조성 유도	✜ 시의회 앞 LOOK LEFT 시범설치(4.15) ✜ 보행중 스마트폰 주의 표지 교통안전시설 심의(5.2)(경찰청) ✜ 보행중 스마트폰 주의 시설물 설치(‘16.6월) ✜ 보행중 스마트폰 주의 교통안전 교육교재 반영(’16.12) ✜ 보행중 스마트폰 주의 시설물 보완설치(’17.4) ✜ 횡단보도 왼쪽보기 시설물 설치 개발(’17.6)
서울시민 걷기 마일리지 프로젝트	✜ 걷기 마일리지 운영 시스템 및 모바일 플랫폼 구축 ✜「걷는 도시 서울」천만 시민 걷기 캠페인 전개 확대 ✜ 서울시민 걷기 커뮤니티 개설 운영 ✜ 사물인터넷 기반 걷기 좋은 길 조성	✜ 모바일 플랫폼 발굴 운영 : 스왈라비(주) 워크온, ✜「걷는 도시 서울」천만 시민 걷기 참여 155개 커뮤니티/ 152,649명 / 386억 걸음 ✜ 걷자 서울! 천만 시민 걷기 캠페인 등 지속추진 ✜ 서대문구 안산길 비콘 설치 (55개) 10,000명 활용
녹색교통 진흥지역 지정 추진	✜ 지정근거 : 지속가능교통물류발전법 제41조 ✜ 지정범위 : 한양도성 내부 (16.7㎢) ✜ 주요사업 : 교통수요관리, 보행중심 녹색교통 이용 촉진, 대중교통 이용 활성화 등	✜ ’16. 4.22 : 녹색교통진흥지역 지정 추진계획 수립 ✜ ’16. 4.28 : 녹색교통진흥지역 지정 신청(市→국토부) ✜ ’16.10. : 국가교통정책조정실무위원회 심의(국토부) ✜ ’16.12. : 국가교통위원회 심의(국토부) ✜ ’17.3.15 : 녹색교통진흥지역 지정 승인(국토부)
교통안전제도개선 추진	✜ 교통안전 관련 법규(지침) 개정 추진 - 무단횡단금지시설 설치지침 개정 등 교통안전 관련 제도개선 ✜ 새로운 안전시설 도입 - 차량용 안전시설 강화, 새로운 노면표시 도입 등 신규 안전시설 도입 추진	✜ ’15~ : 교차로 +자 표시 설치(구청별 70개소) ✜ ’15.11 : 무단횡단금지시설 설치지침 개정 건의(국토부) ✜ ’16.9 : 보행자 안전을 위한 노선버스 전방제동등 설치 건의(국토교통부) ✜ ’16.8~ : 도시부 제한속도 기준마련 협의중
민간사업분야 보행대책수립 의무화 추진	✜ 서울특별시 교통영향평가 수립지침 전면개정 ✜ 체계적 보행환경 개선을 위한 교통영향평가 운영세칙 마련	✜ 보행부문 교통영향평가 강화계획 방침(‘16.10.13) ✜ 서울시 교통영향평가 수립지침관련자문회의(‘16.12.12) ✜ 서울시 교통영향평가 수립지침 개정(‘17.2.16) ✜ 개정 안내문 발송(‘17.5.)