문서번호	계획설계과-1529
결재일자	2019.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	계획설계과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
협 조
	생산관리과장

‘활성탄 재생시설 타당성 검토’

용역 추진 계획(안)

2019. 2.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 최진석 ☎3146-1401 계획설계과장 : 송헌영 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1414

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

“활성탄 재생시설 타당성 검토”

용역 추진 계획(안)

활성탄의 국제 시장 동향 및 국내 재생기술 발전 수준 등의 종합적 검토를 통해 고도정수처리(입상활성탄)시설의 안정적 운영 방안 마련을 위한 용역 추진계획을 보고 드림.

□ 검토 배경

❍ 최근 입상활성탄 신탄 구매가격 상승으로 수급 불안정 우려에 따른 선제적 대응 필요

- 신탄 평균 가격 변화 추이 : ’12년 대비 ’16년 30% 급락, ’17년부터 반등하여 ’16년 대비 22% 상승

가격(원)

22% 상승

30% 급락

❍ 고도정수처리 시설 운영 및 입상활성탄 수급 정책 결정을 위해 ’16년 이후 국내 입상활성탄 재생 기술 발전 동향을 반영한 재생시설 도입의 경제성 및 타당성 재검토 필요성 대두

□ 추진 경위

❍ 활성탄 재생시설도입 기본계획 수립       : ’11. 9. ~ ’12. 5.

- 입상활성탄 재생시설 건설이 위탁재생 및 신탄교체 보다 경제적

· 신탄 가격 : 1,318천원/㎥(2012년 평균 단가)

❍ 입상활성탄 재생시설 건설 기본설계 용역         : ’16. 5. ~ 12.

- 설계 과정에서 경제성 검토 결과 신탄 교체가 재생시설 건설(자체 재생)보다 경제적

· 신탄 가격 : 922천원/㎥(2016년 평균 단가)

· 신탄 교체가 경제적인 상한 가격 : 2,690천원/㎥

❍ 입상활성탄 재생시설 도입 타당성 재검토 필요성 대두 : ’18. 10월

- ’19년 예산(안) 심의 과정에서 용역비 반영

□ 용역 개요

❍ 용역기간 : ’19. 4. ~ ’19. 10.

❍ 용 역 비 : 30백만원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비[사업명 : 정수장 시설 정비(생산부)]

❍ 용역내용

- 입상활성탄 재생시설 건설사업 타당성 검토

· 신탄 교체 및 위탁 재생 가격 동향 조사

· 재생 방법(기술) 검토, 재생 방법별 개략 건설 사업비 산출

· 신탄 구매와 위탁재생 및 재생시설 건설 운영 등에 대해 상호간 경제성 및 타당성 분석

- 검토 대상 용량 : 재생시설 18㎥/일(9㎥/일 × 2기) ⇒ 연간 재생 약 5,400㎥(우리시 연간 재생량의 약 50%)

※ 단, 다양한 용량에 대해 경제성 검토가 필요하다고 판단될 경우 용량을 달리하며 경제성 및 타당성을 검토

□ 기대 효과

❍ 입상활성탄 시장 수급 불안정에 선제적 대응을 통한 깨끗한 아리수의 안정적 공급 체계 구축

❍ 입상활성탄 수급 방안별(자체 또는 위탁 재생, 신탄 교체) 경제성 및 타당성 검토를 통한 고도정수처리 생산 원가 절감 방안 제시

□ 향후 계획

❍ 기술용역 타당성심사 요청      : ’19. 2월

❍ 용역 발주                     : ’19. 3월

❍ 용역 시행                     : ’19. 4. ~ ’19. 10월

붙 임 : 1. 설계내역서(타당성심사 요청용) 1부

2. 과업내용서(안) 1부.  끝.