계약금액조정 검토결과서

건 명		여과지 유출관 교체공사			요청기관 (부 서)		광암아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 8. 29.		공사개요	- 유출배관(450~600㎜) 78m 교체 신축관(450㎜) 24대 교체 기타 부대공사 1식
공사기간		2018. 04. 20. ~ 2018. 12. 15.			도 급 자		㈜ 한진설비 대표 한광희
심사요청(원)					심사결과(원)
당 초		변 경	증 · 감		심사대상	검 토		증 · 감
147,764,540		167,530,000	증)19,765,460		19,765,460	19,765,460		0
구 분		검 토 내 용							비 고
변경사유		○ 공종별 물량 증·감 발생 설계변경 시행(정수시설과-7107, 2018.8.29.) - 공사과정에서, 자재규격 및 물량 증감 발생 - 신규 추가공정 발생 - 내역변경에 따른, 제경비 변경
검토결과	수량, 금액, 지침서등	○ 수량 및 자재규격 변경 검토 : 적정 - 스텐파이프 등 4종 규격변경 및 물량증감 조정 - 스텐상판 가공 등 3종 신규공정 추가 ○ 원가계산, 제경비 등 계약금액 검토 : 적정 - 산재보험료율(4.05%) 오기 수정 ○							조 정 내역서 참 조
	기타	○ 보험료, 퇴직공제부금비, 안전보건관리비 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하시기 바람.
조치사항		○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하시기 바람.