문서번호	방재시설부-9766
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		공원시설과장	방재시설부장
협조	공원개발팀장
	주무관

「경춘선 폐선부지 공원조성공사」

폐기물처리용역 설계변경 검토보고

(전체 1회, 1차 1회)

2014. 10.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「경춘선 폐선부지 공원조성공사」

폐기물처리용역 설계변경 검토보고 (전체 1회, 1차 1회)

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계)』보완설계 완료에 따른 폐기물량 변동사항 등을 검토하고 설계변경 시행코자함

▶ ㈜유신 감리 14-1106(2014.9.29.)호 및 관련

1		용역개요

□ 용 역 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계) 건설

폐기물 처리용역

□ 용역개요 : 건설폐기물 운반 및 처리 11,039톤

□ 용역기간 : ‘13. 12. 13 ~ ‘15. 3. 7

(※1차 : ‘13. 12. 13 ~ ‘14. 12. 12)

□ 용 역 비 : 금272백만원 (1차 금250백만원)

□ 용 역 사 : ㈜대성에코& 정일산업㈜

□ 감 리 사 : ㈜유신 & ㈜건일엠이씨

2		감리원 보고내용

□ 변경 사유

○ 전 체

- 본 공사 전 구간 보완설계에 맞춰 물량 변경

○  금회1차

- 본 공사(1차) 공정추진계획(1차에 폐기물 반출완료)에 맞춰 1차용역에 전체 폐기물 처리 수량 반영

□ 기간변경 : 없음

□ 물량변경

○ 전체

구 분	단 위	당 초	변 경	증⦁감	비 고
1.폐기물운반	㎥	5,766	5,101.4	감) 664.6
1)폐콘크리트	㎥	4,230	2,276	감) 1,954
2)폐아스콘	㎥	141.7	257	증) 115.3
3)혼합건설폐기물	㎥	1,365.7	145.5	감) 1,220.2
4)임목폐기물	㎥	28.6	28.6	-
5)건설폐토석	㎥	-	2,394.3	증) 2,394.3
2.폐기물처리	ton	11,039	9,993.8	감) 1,045.2
1)폐콘크리트	ton	9,730	5,437	감) 4,293	2.30t/㎥
2)폐아스콘	ton	333	604	증) 271	2.35t/㎥
3)혼합건설폐기물	ton	956	101.8	감) 854.2	0.70t/㎥
4)임목폐기물	ton	20	20	-	0.70t/㎥
5)건설폐토석	ton	-	3,831	증) 3,831	1.60t/㎥

○ 금회(1차)

구 분	단 위	당 초	변 경	증⦁감	비 고
1.폐기물운반	㎥	5,290	5,101.4	감) 188.6
1)폐콘크리트	㎥	3,880.8	2,276	감) 1,604.8
2)폐아스콘	㎥	130	257	증) 127
3)혼합건설폐기물	㎥	1,253	145.5	감) 1,107.5
4)임목폐기물	㎥	26.2	28.6	증) 2.4
5)건설폐토석	㎥	-	2,394.3	증) 2,394.3
2.폐기물처리	ton	10,127.8	9,993.8	감) 134
1)폐콘크리트	ton	8,926.9	5,437	감) 3,489.9	2.3t/㎥
2)폐아스콘	ton	305.5	604	증) 298.5	2.35t/㎥
3)혼합건설폐기물	ton	877.1	101.8	감) 775.3	0.70t/㎥
4)임목폐기물	ton	18.3	20	증) 1.7	0.70t/㎥
5)건설폐토석	ton	-	3,831	증) 3,831	1.6t/㎥

□ 용역비 변경

○ 전 체                                                     (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비 고
1)순공사비	76,412	86,887	증) 10,475
①폐기물운반비	76,412	86,887	증) 10,475
2)일반관리비	3,821	4,345	증) 524
3)이 윤	4,593	5,213	증) 620
4)폐기물처리비	162,894	175,191	증) 12,297
1.공급가액	247,720	271,636	증) 23,916
2.부가가치세	24,772	27,164	증) 2,392
3.용역금액	272,492	298,800	증) 26,308

○ 금회(1차)                                               (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비 고
1)순공사비	70,104	86,887	증) 16,783
①폐기물운반비	70,104	86,887	증) 16,783
2)일반관리비	3,505	4,345	증) 840
3)이 윤	4,217	5,213	증) 996
4)폐기물처리비	149,447	175,191	증) 25,744
1.공급가액	227,273	271,636	증) 44,363
2.부가가치세	22,727	27,164	증) 4,437
3.용역금액	250,000	298,800	증) 48,800

□ 감리단 검토의견

○ 상기와 같이 “경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계) 건설폐기물 처리용역” 설계변경(전체 1회, 금회1차 1회)에 대하여 검토한 결과, 기 실정보고하여 승인된 보완설계에 맞추어 수량 및 공사비산출(단가포함) 등이 적절하게 반영되었으며,

○ 본 공사(1차) 추진계획(폐기물 반출완료)에 맞추어 1차용역에 전체 폐기물 수량을  반영하여 용역을 완료하는 것은 적정한 것으로 판단됨

3		검토결과

□ 감리단에서 제출한 폐기물처리용역 설계변경 내용을 검토한 바 적정한 것으로 판단되므로 설계변경(전체 1회, 1차 1회)을 시행하여 발생 폐기물 처리에 만전을 기하고자 함

붙임 : 감리단 검토보고서 및 변경내역서 각 1부.  끝.