문서번호	시설과-383
결재일자	2019.3.4.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
협 조

「국외 서울공원(카이로) 정비공사」

설계 변경 보고(2차)

2019. 2.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

「국외 서울공원(카이로) 정비공사」

설계 변경 보고(2차)

우리사업소에서 추진 중인「국외 서울공원(카이로) 정비공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경하여 사업 시행하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 국외 서울공원(카이로) 정비공사

○ 위    치 : 이집트 카이로주 나세르시 국제공원내

○ 공사기간 : 2018.9.14. ~ 2019.3.10.

○ 공사내용

- 철거공사 : 한국정 난간 제거 등

- 식재공사 : 소나무 전정(14주)

- 시설물공사: 한국정, 서울정 단청 재도색 및 난간 정비 등 5종

○ 총공사비 : 금133,438,000원

○ 도 급 자 : 이우종합건설㈜  대표 이창열

□ 설계변경 사항

○ 주요 변경 내용

구 분	실정사항	변경내용	비고
시설공	▶ 관․부가세 및 통관 세금 현지 관세, 부가세 등 통관 세금 정산	▷ - 관세 ․ 부가세 : 2,892,295원 - 항만사용료 등 기타세금 : 3,421,597원	6,313,892
제경비	▶ 단수정리	▷ 단수정리	-892
증감액 합계			6,313,000

(단위 : 원)

□ 예산 변경내역

(단위 : 원)

구 분		소요 금액			비고
		당 초	변경	증 / 감
총 공 사 비		132,266,000	138,579,000	6,313,000
도급비	공급가액	132,266,000	138,579,000	6,313,000
	부가가치세	0	0	0
	계	132,266,000	138,579,000	6,313,000

※ 선금 지급 : 25,300,000원(2018.9.21.)

○ 공사 기간

- 기간변경  : 해당없음

□ 예산검토

○ 예산조치사항

(단위 : 원)

예산구분	예산액	공사비집행액				비고
		예산배정액 (a)	기품의액 (b)	품의가능액 (c=a-b)	공사비증액
명시이월	120,591,850	120,591,850	106,966,000	13,625,850	6,313,000

‣ 예산과목

- 공원조성과, 생활권 공원확충, 노후공원 재조성, 국외 서울공원 관리실태 점검 및 정비, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

□ 검토의견

○ 상기 공사의 실정 사항을 반영하여 설계 변경 후 공사 시행

붙  임 : 1. 실정사항보고  1부.

2. 변경내역서(2차) 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.