문서번호	교량보수과-2239
결재일자	2014.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	교량보수과장	남부도로사업소장
협 조

- 동작대교(도로교, 철도교) 정밀안전진단용역 -

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

남부도로사업소

(교량보수과)

- 동작대교(도로교, 철도교) 정밀안전진단용역 -

준공기한 연기 검토 보고

동작대교(도로교, 철도교) 정밀안전진단용역 추진과 관련 최근 세월호 사건 등 잇따른 안전사고에 따른 현장 점검결과 추가 지시사항 등으로 한국시설안전공단으로부터 준공기한 연기 요청이 있어 검토하고 준공기한을 연기코자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 동작대교(도로교, 철도교) 정밀안전진단 용역

○ 용역기간 : 2013. 10. 4. ~ 2014. 7. 30.

○ 용 역 비 : 763,000,000원

○ 용 역 사 : 한국시설안전공단 대표 김정수

□ 보고내용

○ 근 거 : 한국시설안전공단 시설안전본부-51(2014. 7.28.)

○ 준공기한 연기 사유(총 60일 연기)

- 서울메트로 토목건축사업소-12668(2014. 7.14)호로 연기요청

∙ 동작대교(철도교)에 대한 추가 현장조사에 따른 용역기간 60일 연장

- 서울시남부도로사업소 교량보수과-1609(2014. 6. 3)호로 동작대교

(도로교) 점검결과에 따른 추가 조사지시에 따른 용역기간 30일 연장

○ 준공기한 연기 요청사항

- 당 초 : 2013. 10.  4. ~ 2014.  7. 30.

- 변 경 : 2013. 10.  4. ~ 2014.  9. 28.(60일간 연기)

○ 검토의견

구분	추가조사내용 및 소요일수	검 토 결 과	비고
도로교	-열화상카메라를 이용한 바닥판 조사 -본교 강재연석 하부 손상조사, 구조 해석, 안정성평가 등으로 30일 추가 소요	-통상적인 과업내용은 구조물의 육안조사 및 일반적인 장비를 통한 시험으로 구조 해석 및 안전성평가를 실시하나, -열화상카메라를 활용하여 콘크리트 바닥 판 조사 및 난간 강재연석 절취하고 손상 상태 조사후 구조해석 안전성 평가는 통 상적인 과업내용이 아닌 추가 과업사항 으로 사료되어 과업기간을 연장함이 타당함
철도교	-철도차량 운행에 따른 횡방향 진동에 대한 검토 등으로 60일 추가 소요	-2014. 5월 이전 재하시험이 완료된후 철도운행부서에서 추가로 철도운행에 따 른 횡방향 진동검토 등 추가 조사 요청으 로 계측후 자료분석 및 평가 등은 추가조 사가 필요하여 과업기간을 연장함이 타당함

□ 조치의견

○ 한국시설안전공단 연기 요청사항에 대하여 검토한 바,

- 서울메트로와 우리시에서 한국시설안전공단에 추가 현장조사 지시 및 구조해석 등 검토결과를 반영후 자문회의 및 서울시 건설기술심의에 따른 공기 연장이 필요할 것으로 사료되어

- 내실있는 과업수행을 위하여 용역기간을 60일간 추가하여 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 행정사항

○ 준공기한 연기의뢰 ⇒ 관리단속과

- 준공기한 연기내용

∙ 당 초 : 2013. 10.  4. ~ 2014. 07. 30.

∙ 변 경 : 2013. 10.  4. ~ 2014. 09. 28.(60일간 연기)

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 준공기한 연기요청 관련 서류 각 1부.  끝.