문서번호	시설과-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
협 조

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역」

준공기한 연장 검토보고

2018. 9.

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역」

준공기한 연장 검토보고

『보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역』과 관련하여 준공 연기 사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고 드림

Ⅰ		용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역

❍ 계약금액 : 금9,700,000원(금구백칠십만원)

❍ 용 역 사

- 운   반 : ***********

- 처   리 : ************

❍ 용역기간 : 2018. 09. 07 ~ 10. 06

❍ 용역내용

- 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 중 발생한 폐기물의 운반 및 처리

Ⅱ		검 토 내 용

❍ 연장사유

- 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사의 철거공사 지연으로 인하여 폐기물        처리 용역의 공사기간 연장 필요

❍ 준공기한 변경내용

구 분	용 역 기 간	비 고
당 초	2018. 09. 07 ~ 2018. 10. 06
변 경	2018. 09. 07 ~ 2018. 10. 31

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

❍ 검토의견

- 용역사로부터 제출된 준공기한 연기사유가 타당하다고 판단되므로

계약부서에 변경계약 요청하고자 함

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 2018. 09. 27 ~ 10. 04 : 준공기한 연기 의뢰

❍ 2018. 10. 31 : 용역 준공

붙   임 : 준공기한 연기 요청 공문(용역사) 1부.  끝.