“ 교육중심 녹색복지도시 노원”
		노원구
수신	서울특별시장(공원조성과장)
(경유)
제목	「불암산도시자연공원 공릉지구 조성」 부족 예산 확보 및 재배정 요청

「불암산도시자연공원 공릉지구 조성」 관련 대상지 추가보상 및 공사비 증액에 따른 추가 예산 확보를 요청드리며, 공사비 및 측량수수료를 아래와 같이 재배정 요청합니다.

1. 사 업 명 : 불암산도시자연공원 공릉지구 조성

2. 대 상 지 : 노원구 하계동 1번지 일대

3. 사 업 비 : 3,600백만원(보상비 136, 조성비 3,464)

4. 예산내역 및 재배정요구액                                             (단위 : 원)

예산현액 (명시이월, 시설비)	소요예산(A)		기재배정액(B)	부족분(A-B)	재배정요구액	비고
3,306,261,000	소 계	4,235,261,000	3,306,261,000	929,000,000	873,888,400
	측량수수료	1,005,400	-	1,005,400	1,005,400	우선 요청
	공 사 비	4,179,144,000	3,306,261,000	872,883,000	872,883,000
	보상비(예상)	55,111,600	-	55,111,600	-	추후 요청

붙임 1. 관련공문 사본 1부.

2. 계약심사 결과

3. 설계내역서 각1부.(용량 초과로 별도 송부)

4. 현황측량(추가보상 대상지) 관련공문 1부.     끝.

							노 원 구 청 장
주무관										공원기획팀장										공원녹지과장
협조자
시행			공원녹지과-9776									(	2016.04.14.					)		접수			공원조성과-4622								(	2016.4.14.					)
우	139-703					서울특별시 노원구 노해로 437(상계6동 701-1)															/			http://nowon.seoul.kr
전화		02)2116-3943						/전송			02)2116-4636					/	8542@nowon.go.kr												/	비공개(6)