문서번호	시설과-161
결재일자	2019.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
협 조
	전략기획실장
	주무관
	주무관

「서울대공원 건축시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역」실시 계획(안)

2019. 1.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

서울대공원 건축시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역 실시 계획(안)

서울대공원 건축시설물에 대하여 지진발생 대비 내진성능평가용역을 실시하고, 보수·보강을 통해 지진 등 재해로부터 인명 및 시설물 피해를 예방코자 함

Ⅰ		추진근거

○ 지진·화산재해대책법 제15조 및 제16조

- 기존 시설물의 내진보강기본계획 수립 및 내진보강 추진 등

○ 건축법시행령 제32조 제2항(구조안전의 확인)

－ 2층 이상 또는 연면적 200㎡ 이상 건축물

○ 서울대공원 공공시설물 내진보강 계획(원장방침 시설과-1952호(‘17.4.8))

－ 시설물별 연차적(‘18년 ~ 25년)으로 건축물 내진보강 추진

Ⅱ		추진계획

○ 서울대공원 건축시설물 내진대상 현황(서울랜드 포함)

구 분	대상시설	내진적용	‘18년 용역 완료	‘19년 용역 예정	비 고
서울대공원	50	2	34	13	“동물원 정문” 제외 (‘19년 리모델링 예정)
서울랜드	28	-	-	28
계	78	2	34	41

○ ‘18년 내진성능평가 용역 결과

- 34개 시설물 내진보강공사 불 필요

- 해양관 및 야행관 안전등급 상향 (C등급 ⇒ B등급)

○ 서울대공원(서울랜드 포함)내 내진성능 미 확보 건축물 내진성능       평가용역 실시(건축물 41개소. 연면적 : 26,513㎡)

○ 용역 결과에 따라 시설물별 보강 우선순위를 결정하고, 예산확보 후      연차적으로 보수·보강공사 시행

Ⅲ		용역개요

○ 용 역 명 : 「서울대공원 건축시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역」

○ 소요예산 : 290,000(천원)

－ 예산과목 : 서울대공원, 공원 이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능     및 야생동물 종 보존, 공원 안전시설 보수 및 정비, (100-401-01)시설비, 건축시설물 내진 보강공사(200,000천원), 건축시설물 정밀점검 및 보수보강(90,000천원)〕

※ 부족예산 90,000(천원)은「건축시설물 정밀점검 및 보수보강」예산 사용

○ 용역기간 : 착수일로부터 ~ 6개월

○ 대상시설물 : 건축시설물 41개소(붙임 참조)

○ 용역 보고회 개최

착수계 제출		착수 보고회		중간 보고회		최종 보고회
계약후 7일 이내		착수후 30일 이내		준공 90일 전		준공 30일 전

※ 기술자문 실시(분야별 “서울시 건설심의의원” 3인 이상)

○ 내진성능평가 주요 사항

－ 자료검토 : 외관조사망 도면 등 각종 자료 검토

－ 정밀안전점검 실시

－ 외관(육안)조사 및 비파괴 검사 : 부재실측, 콘크리트 상태 조사 등

－ 내진해석 : 시설물 구조해석 및 계산을 통한 평가

－ 내진보강 방안 및 내진보강 공사를 위한 도면 및 공사비 산출내역서

－ 내진보강 우선순위 선정 등

Ⅳ		입찰방법

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰

○ 입찰 참가자격

－『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제28조』에 의거 안전         진단전문기관(건축 또는 종합분야)으로 등록된 업체

－ 국토교통부 ‘기존 시설물(건축물)내진성능 평가요령’ 평가자의 자격에 따라      건축구조기술사 또는 이와 동등한 자격을 가진 구조전문가를 보유한 업체

○ 업체선정 방법

－ 건설기술진흥법 시행규칙 제28조 제1항2호『건설기술용역업자 등의 선정』  기준에 따라 사업수행능력평가(PQ)방식에 의거 선정(용역비 1억원 이상)

Ⅴ		추진계획

○ 2019. 01 : 사업계획서 방침

○ 2019. 02 : 기술용역타당성 심사 및 입찰공고

○ 2019. 03 ~ 04 : 사전규격 공개 및 사업수행능력(PQ) 평가

○ 2019. 05 : 용역 착수

○ 2019. 06 : 착수 보고회

○ 2019. 08 : 중간 보고회

○ 2019. 09 : 최종 보고회

○ 2019. 10 : 용역 준공

Ⅵ		처 리 의 견

○ 건축시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역을 실시하여 지진       등 재해로부터 인명을 보호하고, 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

붙임 : 내진성능평가 대상시설물 현황.  끝.