투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	수신자참조
(경유)
제목	「서울대공원 시설물 옥상방수 및 시설개선 공사」 동절기 공사중지 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하며, 도로관리과-15834호(‘18.10.23)와 관련입니다.

2. 우리 대공원과 계약체결 하신  「시설물 옥상방수 및 시설개선 공사(건축,전기,통신)」와 관련하여       공사 품질확모를 위하여 아래와 같이 공사중지 통보하오니 참고하시기 바랍니다.

○ 공사중지 내용

- 세부사항

단위 : (원)

구 분	분 야	시공자	계약금액	계약기간	비 고
서울대공원시설물 옥상방수 및 시설개선 공사	건축	동우메인티넌스 대표자 한조병	259,013,600	‘18.12.17 ~ ‘19.04.15	동절기 습식공사 불가
	전기	㈜동오전력 대표자 김미영	15,246,000	‘18.12.11 ~ ‘19.04.09	건축공정에 의거
	통신	㈜메가이엔씨 대표자 최지영	13,500,000	‘18.12.11 ~ ‘19.06.30	〃

- 공사중지 기간 : 2018. 12. 17(월) ~ 2019. 2. 28(목)

- 사    유 : 동절기로 인한 공사중지.

- 귀책사유 : 서울대공원.  끝.

	서울대공원장
수신자	동우메인티넌스(주) 귀중,(주)동오전력 귀중,(주)메가이엔씨 귀중
★주무관			시설과장
협조자	주무관
시행	시설과-7919	(		)	접수		(		)
우			/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7412	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개