문서번호	방재시설부-14405
결재일자	2017.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
협조
	주무관

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

디자인휀스 변경설치 실정보고 검토보고

2017. 8.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

디자인휀스 변경설치 실정보고 검토보고

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」디자인휀스 변경설치 실정보고에 대한 검토 보고임.

【관련근거 : 서울역(건)제17-593호(2017.08.17.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사

○ 공사위치 : 서울시 중구 남대문 5가 ~ 만리동 1가 62

○ 시 공 사 : 홍익건설산업(주), ㈜동원개발

○ 도 급 비 : 25,138,300,000원(조경 : 5,918,270,000원)

○ 공사기간 : 2016.04.18. ~ 2017.10.31.

□ 보고내용

- 만리동광장과 퇴계로 교통섬에 설치되는 디자인 휀스가 관급자재로 계획되었으나 디자인 변경 지연으로 사급 전환 시행.

- 디자인휀스 현황

디자인 휀스(당초)	디자인 휀스(변경)

- 관련근거

․지상구간 난간와이어 재질 적용 : 도시기반시설본부 17-962 (2017. 02. 01)

․실정보고(디자인휀스 사급 요청) : 홍익17-126 (2017. 04. 24)

․실정보고(디자인휀스 사급 전환) : 서울역(건)17-339 (2016. 04. 24)

․실정보고 승인(수급방법 변경) : 도시기반시설본부 17-4459 (2017. 05. 04)

- 수량검토

위 치	공종	당 초(관급)			변 경			비 고
		규 격	단위	수 량	규 격	단위	수 량
만리동광장	디자인 휀스	Steel 각관 H=1,160	m	521	STS Wire H=1,200	m	317
퇴계로교통섬	디자인 휀스			-	STS Wire H=1,200	m	306
	코어 설치	Φ150xH250		-		개소	162

○ 공사비 증감내용                                    (단위:천원)

공 종	단위	변경전			변경후			증 감	비 고
		수량	단가	금 액	수량	단가	금 액
디자인 휀스 설치공사
1-5 본선교량부대공
디자인난간 제작설치 (만리동광장)	m			-	317		93,248	+) 93,248
디자인난간 제작설치 (퇴계로 교통섬)	m			-	306		90,012	+) 90,012
난간기초 코어설치	개소			-	162		8,468	+) 8,468
소 계				-			191,728	+) 191,728
직접공사비				-			191,728	+) 191,728
제경비				-			57,172	+) 57,172
공급가액				-			248,900	+) 248,900
부가가치세				-			24,890	+) 24,890
도급 공사비				-			273,790	+) 273,790

※ 협의율(90.014%) 적용한 공사비임

○ 신규단가 적용 : 별도 협의

- 시공사로부터 협의율(90.014%) 적용하여 실정보고 되었으나 별도 협의 후 적용

□ 건설사업관리단 검토의견

○『서울역 7017 프로젝트 건설공사(조경)』시행중 만리동광장과 퇴계로 교통섬의 디자인 휀스에 대한 실정보고를 검토한 결과 외곽 난간이 당초 STEEL 각관의 관급자재로 설계되었으나 설계자의 의도로 가로선 주봉의 자재 (STS Wire) 및 디자인을 변경하는 과정에서 자재의 수급 방법이 사급으로 실정 보고, 승인 되었으며 옹벽 상단면에 설치하는 만리동광장과 블록 포장면에 코아 작업으로 고정하는 퇴계로교통섬 구간의 작업 방법을 구분하고 현장 여건에 의한 수량 증감 적용 및 단가 산출이 적정 하므로 실정보고하고 추후  설계변경에 반영 하고자 함.

□ 보고자 의견

○  “서울역 7017 프로젝트 건설공사(조경)”중 「디자인휀스 변경설치」에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 승인 통보하여 현장 반영하고 공사비에 대하여는 신규단가 협의를 통해 재조정하여 향후 설계변경 시 정산조치하고자 함.

붙 임  건설사업관리기술단 실정보고 1부.  끝.