문서번호	방재시설부-11581
결재일자	2017.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
협 조
	주무관

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

인포가든 포트이설 및 수목이식

2017. 7.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

인포가든 포트이설 및 수목이식

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」인포가든 철거에 따른 포트이설 및 수목이식실정보고에 대한 검토 보고임.

【관련근거 : 서울역(건)제17-489호(2017.07.03.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사

○ 공사위치 : 서울시 중구 남대문 5가 ~ 만리동 1가 62

○ 시 공 사 : 홍익건설산업(주), ㈜동원개발

○ 도 급 비 : 25,138,300,000원(조경 : 5,918,270,000원)

○ 공사기간 : 2016.04.18. ~ 2017.10.31.

□ 보고내용

- 인포가든 조성 품목중 재활용이 가능한 식재포트와 수목을 수요처에 이설 및 이식하였음

- 인포가든 철거 및 이설(식) 현황

수목 이식	식재포트 이설

※ 서울역일대종합발전기획단-1840호(2017.2.27.)

「서울로 7017 인포가든 운영종료에 따른 물품 재활용 방안 검토요청」에          의거 활용가능한 시설물 이설 및 수목 이식

- 수량검토

공 종	당 초			변 경			비 고 (이전장소)
	규 격	단위	수 량	규 격	단위	수 량
인포가든
식재포트 이설
식재포트(D1,000 H950)		개소	-	D1,000 H950	개소	4	천호공원
식재포트(D1,700 H650)		개소	-	D1,700 H650	개소	3	보라매공원
식재포트(D1,700 H950)		개소	-	D1,700 H950	개소	3	서울숲
수목이식
스트로브잣나무 이식			-	H1.5xW0.6	주	1	연평양묘장
반 송 이식			-	H2.0xW2.5	주	1	″
반 송 이식				H1.2xW1.5	주	10	″
주 목 이식			-	H2.5xW1.2	주	1	″
산사나무 이식			-	H2.5xR6	주	1	″
사과나무 이식			-	H3.0xR8	주	1	″
팥배나무 이식			-	H3.5xR8	주	1	″
계수나무 이식			-	H2.5xR10	주	1	″
백 송 이식			-	H1.5xR6	주	1	″
소나무(조형) 이식			-	H3.5xR15	주	1	″
장 미-골든보더(황색) 이식			-	H0.3 3~4년생	주	55	경춘선공원
장 미-스노우콘(백색) 이식			-	H0.3 3~4년생	주	35	″
장 미-조지베스트(적색) 이식			-	H0.3 3~4년생	주	55	″
사계장미-칵테일 이식			-	H0.3 3~4년생	주	180	″

○ 공사비 증감내용                                    (단위:천원)

공 종	단위	변경전			변경후			증 감	비 고
		수량	단가	금 액	수량	단가	금 액
다. 인포가든 공사
Ⅸ-5 식재포트 이설 및 수목이식 공사
식재포트 이설	식			-	1		3,640	+) 3,640
수목 이식	식			-	1		2,966	+) 2,966
소 계				-			6,606	+) 6,606
직접공사비				-			6,606	+) 6,606
제경비				-			3,124	+) 3,124
공급가액				-			9,730	+) 9,730
부가가치세				-			973	+) 973
도급 공사비				-			10,703	+) 10,703

○ 관련 근거

- 인포가든 식재포트 및 수목이식 결과보고

(방재시설부 - 5855.  2017. 4. 7)

○ 신규단가 적용

- 관련 근거 : 협의율 조정회의 결과 알림 (방재시설부-3054.  2017. 2. 23)

- 강제 협의율 적용 : 90.014%

[ ( 낙찰율 : 80.027% +설계가 : 100% ) x 1/2 =90.014% ]

□ 건설사업관리단 검토의견

○   “서울역 7017 프로젝트 건설공사(조경)” 시행중 “서울로“ 개장에 앞서 보행로의 모습을 공개하고 본공사 시공시 발생하는 문제점을 점검하기 위해 2016년 6월 조성된 인포가든의 시설물중 인포가든 운영 종료전 재활용이 가능한 수목 및 시설물을 수요처 조사를 통해 협의하여 식재포트는 서울숲 공원외 2개소, 수목은 서울시 양묘장외 1개소에 이설 및 이식한 작업으로 식재포트의 경우 배양토등의 내부 충진물을 굴토하여 포장, 운반한 공종으로 공사비 산출이 곤란하므로 관련사(3사) 견적서를 받았으며, 수목이식 공종은 서울시 도시기반시설본부 ‘조경공사 설계 대가기준’을 적용한 사항으로 시설의 재활용 취지와 공사비 산출이 적정한 것으로 사료되어 실정 보고 하고 추후 설계 변경에 반영 하고자 함.

□ 보고자 의견

○  “서울역 7017 프로젝트 건설공사(조경)”중 「인포가든 식재포트 이설 및 수목이식」에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 승인 통보하여 현장 반영하고 향후 설계변경 시 정산 반영 조치하고자 함

붙 임 1.  건설사업관리기술단 실정보고 1부.

2.  인포가든 식재포트 및 수목이식 결과보고 1부.

3. 서울로 7017 인포가든 운영종료에 따른 물품 재활용 방안 검토요청 1부.  끝.