문서번호	안전총괄과-8169
결재일자	2018.7.4.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사회안전팀장	안전총괄과장
협조

「송파안전체험교육관」

사업계획 변경승인요청 검토 보고

2018. 7.

안전총괄본부

(안전총괄과)

「송파안전체험교육관」

사업계획 변경승인요청 검토 보고

송파안전체험교육관의 시설 위험요소를 정비하고 타 안전체험관과의 차별화를 위한 일부 사업계획 변경을 검토하고 보고드림

Ⅰ		사업개요

❍ 시 설 명 : 송파안전체험교육관(송파구 성내천로 35길 53)

❍ 규    모 : 5,516.35㎡(지하1/지상4층, 실내 2,600.35㎡, 실외 2,916㎡)

❍ 주요사업 : 생활안전교육(가정, 재난, 교통 등), 자전거 교육 및 인증 등

❍ ’18년 예산 : 756백만원

- 운영비 : 656백만원 / 시설비 : 100백만원

※ 보조율 : 운영비 - 시비 80%, 구비 20%, 시설비 - 시비 100%

Ⅱ		변경승인 요청내용

구분	변경전	변경후	비고
계	30,000천원
안전난간 및 안전바 설치	30,000천원	15,000천원	△15,000천원
노후전선케이블 교체 및 보강	-	15,000천원	15,000천원

Ⅲ		검토 의견 : 승인

❍ 당초 안전한 교육환경 조성을 위한 시설 환경개선 사업으로 안전난간 및 계단 추락방지시설 등을 설치할 예정이었으나,

❍ 교육관 증축 후 전력량 증가에도 불구하고 최초 설립당시 포설한 전선케이블에 대해 보강작업이 이루어지지 않아 정전 발생 및 안전사고 위험 증대로 사업계획을 변경․시행하고자 하는 사안임

❍ 안전사고 예방을 위해 사업계획 변경에 대한 타당성이 있다고 판단됨

- 전선 케이블 교체 등은 정전으로 인한 안전사고 예방을 위해 보강작업 필요

- 교육관 옥상 안전난간 및 안전바 설치는 2017.11월 서울시 안전점검시 추락위험 발생요소로 인한 보강요청사항으로 작업 필요

붙 임  1. 송파안전체험교육관 사업계획변경 승인요청 1부.

2. 송파안전체험교육관 VR체험존 조성 및 시설환경개선계획 1부.  끝.