「수도권광역급행철도 A노선」

철도차량 제작관련 출장 계획(안)

수도권광역급행철도 민간사업자인 SG Rail과의 계약에 의거하여 우리공사가 수탁 관리중인 GTX-A노선 철도차량의 제작 공정이 착수됨에 따라 공정  관리 및 출고검사 등을 위한 제작사 출장 계획을 수립하여 보고드림

[관련근거]

◦ GTX-A노선 민간투자사업 철도차량 물품공급(구매) 계약(2020.3.19.)

◦ 공사 여비규정(규정 제286호, 2021.2.25. 개정)

◦ GTX-A노선 민간투자사업 철도차량 제작관리 위임 계약서(2020.4.29.)

◦「GTX-A노선 철도차량 상주 공정관리 시행 검토요청에 대한 회신」(철도사업처-5503, 2021.11.23.)

Ⅰ		추진경과

□ 철도차량 물품공급(구매)계약 체결	(2020. 03월)
□ 철도차량 제작관리 위임계약 체결	(2020. 04월)
□ 착수보고회 실시	(2020. 05월)
□ 기본설계 설명회 시행	(2020. 10월)
□ 철도차량 제작관련 기본설계 승인	(2021. 03월)
□ 차량 Mock-up 품평회 실시	(2021. 04월)
□ 철도차량 제작관련 상세설계 승인(조건부)	(2021. 08월)
□ 철도차량 제작 대조립 공정 착수	(2021. 10월)

Ⅱ		사업개요

□ GTX-A노선 철도차량 공급계약 개요

계 약 명	계 약 자	계약금액	계약기간	공급대상
GTX-A노선 민간투자사업 철도차량 물품 공급 계약	SG Rail(주) ↔ 현대로템(주)	3,452억원 (부가세포함)	’20.3.19 ~ ’24.7.29 (준공 후 1개월)	철도차량 120량 입환작업차 1대 시설물 모니터링시스템 진동발열감지장치 등

□ GTX-A노선 철도차량 제작관리 계약

계 약 명	계 약 자	계약금액	계약기간
GTX-A노선 철도차량 제작관리 위임계약	SG Rail(주) ↔ 서울교통공사	30억원 (부가세포함)	’19.10월~’24.6월

□ 사업일정 및 공정 현황

○ 사업일정

구 분	계	2022년	2023년	비 고
물 량	15개편성 (120칸)	초도편성 (8칸)	양산편성 (112칸)	납품기준

○ 공 정 률: 계획 22.32%, 실적 22.08% (△0.24) _ ’21.11.25. 기준

○ 공정현황: 초도편성 1~5호 차량 대조립 공정 진행 중

Ⅲ		출장계획

□ 제작사 상주 공정관리

○ 출 장 지: 현대로템(주) _ 경남 창원시 소재

○ 출장기간: 2021. 12. 01.(수) ~ 별도 명령 시 까지

○ 출장인원: 2명(부장1, 직원1) _ 주기별 교대 출장

- 교대주기: 부장 1개월, 직원 2주 단위 _ 필요시 변경가능

- 공정진행 상태 및 근무여건에 따라 출장인원 변경 가능

○ 주요업무

구 분	내 용
주요업무	□ 승인된 기술자료, 설계도면과 제작차량 일치여부 확인 □ 제작감독용역 관리 및 작업 기준서(절차서) 준수 여부 □ 부적합사항 조치내역 확인 □ 제작 품질 및 작업환경, 공정진행 확인 등 공정관리 □ 철도안전법의 형식시험 및 부품검사 등 출장입회(필요 시) □ 일일업무, 월간공정, 이례상황 등 보고(철도사업처, 품질센터) □ 전동차 제작관련 차량제작사, 제작감독, 관련기관 업무협의 등

○ 업무처리 절차

제작사양 및 승인자료 등과 차량제작상태 비교 확인 부적합 사항 발생 시정조치 요구 (공정관리자 → 제작감독자 → 차량제작사) 조치 여부 판단 (조치 완료) (조치 미이행) 종 결 (조치결과 이력관리) 공정 중단 등 조치 (차량품질관리센터 보고) 제작감독자(전문기관), 제작사에 시정조치 재요구	제작사양서 및 승인자료(기술자료, 승인도면 등) 사전 숙지
	사양과 설계 합치성 확인
	제작사 품질관리담당, 제작감독자와 협의(기한, 방법 등) 주요사항 차량품질관리센터 보고
	시정조치 요구사항 결과 확인
	차량품질관리센터 부적합사항 관리 (제작사 조치 요구)
	차량제작사, 제작감독자와 미이행 사유 확인 후 기한 및 방법 재협의

□ 출고검사

○ 출 장 지: 현대로템(주) _ 경남 창원시 소재

○ 출장기간: 편성별 완성차검사 종료 시(’22년 7회, ’23년 8회 예정)

○ 출장인원: 4명(부장1, 직원3) / 1회당

○ 주요업무

구 분	내 용
주요업무	□ 차량 외관상태 및 장치별 기능 점검 □ 차량 유지보수 적합성 점검 □ 부품, 구성품, 완성차시험 결과 일부 확인 □ 품질개선 필요사항 협의 □ 출고 준비상태 점검 등

□ 기타출장

○ 출장목적: 부품 형식시험 입회 및 품질점검 출장 등

○ 출 장 지: 국내·외 부품제작사, 시험기관 등

○ 출장인원: 2명(장치별 담당자) / 1회당

○ 주요업무

구 분	내 용
주요업무	□ 시험편 적합성 및 시험장비 교정상태 확인 □ 시험 조건 및 시행 방법의 적합성 확인 □ 장치별 품질관리상태 점검 및 기술 협의 등

Ⅳ		소요예산 및 기타사항

□ 소요예산                                          [단위: 백만원]

구 분	총 계	2021년	2022년	2023년	비고
총 계	125	5	73	47
공정관리	104	5	63	36
출고검사	21	-	10	11

※ 참고 1. 기타출장(형식시험 입회 등) 소요비용 제외

참고 2. 공정진행 상태에 따라 소요비용 변경 가능

○ 예산항목: (기타)GTX-A 관리운영(지출), [매]여비/국내

□ 공정관리자 COVID-19 확산방지 방역지침 철저 준수

○ “생활 속 거리두기 지침” 준수

- 외부 출장 또는 외부자 대면 시 생활 속 거리두기 준수

- 상시 마스크 착용

- 회의 진행 시 참석자 간 간격 확보

- 회의 전․후 악수 등 신체적 접촉 금지

○ 공정관리자 사무실 관리

- 사무실 내 체온계 및 손 소독제 비치

- 1일 2회 체온 측정, 기록 유지

※ 참고 1. 출장 중 코로나 확진자 발생 시 출장 중단 등 조치

참고 2. 코로나 확산으로 “사회적 거리두기 지침”으로 환원시 별도 대응방안 검토 조치

Ⅳ		결 론

공사 수탁사업인 GTX-A노선 철도차량의 대조립 제작 공정이 착수되어 COVID-19 확산방지 방역지침을 준수하면서 철도차량 제작공정 관리를 위한 출장을 시행하여 체계적이고 효율적인 공정관리를 통해 신조 차량의 안전성 및 품질 확보에 만전을 기하겠습니다.

붙임  1. 출장비용 산출내역 1부.

2. 철도차량 제작 대일정 계획 1부.  끝.

2021. 11. 26.

차량본부 차량품질관리센터