문서번호	건축부-15342
결재일자	2016.11.7.
공개여부	비공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	복지시설과장	건축부장
협 조

「시립북부장애인복지관 증축공사」

설계공모심사 결과 및 향후계획 보고

2016. 11.

도시기반시설본부

건 축 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「시립북부장애인복지관 증축공사」

설계공모심사 결과 및 향후계획 보고

『시립북부장애인복지관 증축공사』설계공모 작품에 대하여 심사한 결과 당선작품을 선정하지 못함에 따라 향후계획을 보고 드림

Ⅰ		사업개요

○ 대지위치 : 노원구 상계동 771

○ 건립규모 : 지상3층 증축 1,046㎡

○ 주 용 도 : 노유자시설(장애인복지관)

○ 사 업 비 : 2,950억원(설계비:134백만원)

○ 사업기간 : 2016년 9월 ~ 2018년 12월

○ 용역기간 : 착수일로부터 130일

Ⅱ		추진경위

○ 2016. 07. 06 : 설계 및 공사발주 의뢰(장애인자립지원과 → 건축부)

○ 2016. 08. 06 : 설계내용변경 통보(장애인자립지원과  → 건축부)

○ 2016. 08. 08  : 지명설계공모 참여건축가 지정 요청(건축부 → 도공단)

○ 2016. 09. 22  : 지명설계공모 참여건축가 지정 (도공단 → 건축부 )

○ 2016. 09. 30  : 설계용역 시행계획 방침수립 및 공공건축가 선정 통보(도기본 → 참여건축가)

○ 2016. 10. 05  : 응모접수 및 현장설명회 실시

○ 2016. 11. 01  : 응모 작품접수

○ 2016. 11. 04  : 작품 심사위원회 개최

Ⅲ		작품심사 개요

○ 일시 및 장소 : 2016.11.04(금) 16:00 ~ 18:00 / 건축부 회의실

○ 심 사  위 원 : 박인석(명지대 교수), 허범팔(국민대 교수), 신춘규(건축가),

박제유(건축가), 김인철(건축가), 박준석(시립노원시각장애인복지 관장),

정행건(시립뇌성마비복지관 관장)

○ 심 사  대 상 : 3개 업체(작품 제출업체)

- 구보건축사사무소 조윤희

- 건축사사무소 mald project 홍영애

- 해담은 풍경 건축사사무소 백창용

Ⅳ		작품심사 결과

○ 당선작, 우수작, 가작 모두 선정 보류

○ 선정보류 사유

- 증축의 범위가 불명확

- 기존(지하1, 지상1, 2층) 공사범위가 불명확

○ 심사위원회 의견

- 참여업체(3개업체)에게 일정기간 보완작업 후 재심의토록 함

심사 진행사진

Ⅴ		향후 계획

○ 2016. 11.  8  참여업체(3개업체)에 보완 작품 제출토록 안내문 송부

○ 2016. 11. 30  작품 제출 기한

○ 2016. 12.  2  심사위원회 개최 예정

○ 2016. 12. 13  설계용역 계약의뢰

Ⅵ		행정사항

○ 심사위원 수당 지급

- 산출근거 : 264,306원 × 1일 = 264,000원 (천단위 이하 절사)

※ 엔지니어링 사업대가기준 특급기술자 264,306원 (2016년도 적용)

※ 현장 사전답사 및 공모안 사전검토에 따른 1일 수당 지급

- 위원수당 : 264,000원 × 4인 = 1,056,000원

※ 나머지3인 체부동 생활문화센터 심의수당에서 지급(연속심의)

○ 심사관련 소요 경비

- 심사필요 용품  구입 등 : 20만원

붙 임    1) 설계공모 접수대장 1부.

2) 작품발표자 참석조서 1부.

3) 심사위원 참석조서 등 1부.

4) 심사위원회 위원장 선정 의결서 1부.

5) 심사방식 의결서 1부.

6) 심사결과 1부.끝.