문서번호	방재시설부-10891
결재일자	2019.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
협조
	주무관

「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 전면책임감리용역」

설계변경(총차10회, 6차2회) 및 공기연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7

도시기반시설본부

- 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 전면책임감리용역 -

설계변경(총차10회, 6차2회) 및 공기연장 검토보고

본 공사의 공기연장(카-리프트 설치 등)에 따른 전면책임감리용역 상주건설사업관리기술인 투입조정에 대한 설계변경 및 감리용역 준공기한 연기 검토 보고임

□ 관련근거

○ 수성 제2019-2640(2019.7.22) : 감리용역 변경설계서      (총차10회, 6차2회) 제출

□ 용역개요

○ 용역명 : 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 전면책임  감리용역

○ 용역비 및 용역기간

구 분	총 차 분	1차분 (준공)	2차분 (준공)	3차분 (준공)	4차분 (준공)	5차분 (준공)	6차분 (현재)	잔여
총용역비 (백만원)	6,836	157	795	760	1,200	2,000	1,192	732
용역기간	`13.01.07~ `19.07.31	‘13.01.07. ~ ’13.08.21.	‘13.08.22. ~ ‘15.02.28.	‘15.03.01. ~ ‘15.12.31.	‘16.01.01. ~ ‘16.12.31.	‘17.01.01. ~ ‘18.02.22.	‘18.02.23. ~ ‘19.07.31.

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링 외 4개사(천일, 동일, 범한, 한방)

□ 보고내용

[총차 10회 변경]

○ 공사 준공기한 연장 및 공사규모 축소에 따른 적정 상주기술인   배치와 예산의 효율적 집행을 위한 등급 조정(하향) 보고임.

- 전면책임감리 : 560.71인·월 → 584.23인·월(증23.52인·월)

- 등급조정 : 책임감리원(수석감리사→감리사), 전기감리원(특급→고급),

건축·기계 감리원(감리사→감리사보)

※ 등급조정기간 / 예산절감 : 2019년 1월 ~ 12월 / 200백만원

○ 휴일 및 연장근무 일수 대가 반영

- 휴일근무 : 793일→932일(증139일)

- 연장근무 : 70시간→185시간(증115시간, BP장 운영 관련)

○ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증,감	비고
계약금액	6,836,000천원	7,168,000천원	증)332,000천원
용역기간	‘13.01.07~’19.07.31	‘13.01.07~’19.12.20	증)142일
과업내용
전면책임감리	560.71 인․월	584.23 인․월	증)23.52 인․월
손해배상보험료	95,700천원	102,300천원	증)6,600천원
휴일(야간)근무	793일	932일	증)139일
연장 근무	70시간	185시간	증)115시간

[6차 2회 변경]

○ 공사 준공기한 및 공사규모에 맞추어 적정 상주기술인 배치와     예산의 효율적 집행을 위한 상주기술인 등급 조정 조치

- 전면책임감리 : 101.22인·월 → 187.92인·월(증86.70인·월)

- 등급조정 : 책임감리원(수석감리사→감리사), 전기감리원(특급→고급),

건축·기계 감리원(감리사→감리사보)

※ 등급조정기간 / 예산절감 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 휴일 및 연장근무 일수 대가 반영

- 휴일근무 : 161일→300일(증139일)

- 연장근무 : 70시간→185시간(증115시간, BP장 운영 관련)

※ 휴일(연장)근무로 증액되는 49백만원은 공사 설계변경시 도급비     에서 감액 조치 예정

○ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증,감	비고
계약금액	1,192,000천원	2,255,600천원	증)1,063,600천원
용역기간	‘18.02.23~’19.07.31.	‘18.02.23~’19.12.20.	증)142일
과업내용
전면책임감리	101.22인․월	187.92인․월	증)86.70인․월
손해배상보험료	14,190천원	46,750천원	증)32,560천원
휴일(야간)근무	161일	300일	증)139일
연장 근무	70시간	185시간	증)115시간

□ 준공기한 연기

○ 본 공사 준공기한 연기에 따른 전면책임감리용역(총차 및 6차) 준공기한 연기 조치

- 준공기한 변경

구분	당초	변경	비고
총차	2013.01.07.~2019.07.31	2013.01.07.~2019.12.20.	증142일
6차분	2018.02.23.~2019.07.31	2018.02.23.~2019.12.20.	증142일

- 연기사유 : 본 공사 카리프트 추가 설치 등에 따른 공기연장에                   의한 전면책임감리용역 준공기한 연기

- 귀책소재 : 서울시도시기반시설본부(지체상금 미부과)

□ 건설사업관리기술인 배치계획

○ 총차분

○ 6차분

□ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 공사 준공기한 연장 및 규모 축소에 따른 상주감리원 감 배치와 예산의 효율적 집행을 위한 상주기술인 등급 조정을 통한 설계변경(공기연장)사항은 적정한 것으로 판단됨에  따라 계약부서에 변경 의뢰코자함

붙임  1. 용역 설계변경 도서 1부.  끝.