문서번호	시설과-1396
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
협조

「어린이대공원 놀이동산 영상감시설비(CCTV)구매설치」

설계변경 검토보고

동부공원녹지사업소

시설과

「어린이대공원 놀이동산 영상감시설비(CCTV)구매설치」

설계변경 검토보고

납품현황

❍ 납 품 명 : 어린이대공원 놀이동산 영상감시설비(CCTV)구매설치

❍ 공사개요 : CCTV 15대, 서버 및 모니터시스템 등

❍ 계약금액 : 190백만원

❍ 공사기간 : 2014. 02. 25 ～ 2014. 04. 30

❍ 납품업체 : (주)영국전자

주요 설계변경사항

구분	당 초	변 경	변경사유	비 고
광케이블 설치	▷광케이블 설치 -놀이동산 : 8C -대공원상황실 : 8C	▶조광케이블 설치 -놀이동산 : 24C+8C -대공원상황실 : 24C+8C	카메라별 광 여유단자(2포트)설치요구 와 향후 증설분 반영
광케이블 접속 등	▷ 광장비 규격 : 8C - 광분배함 8C 2개 - 접속슬리브,피그테일,패치코드, 국내성단,코아접속,최종시험, 외피접속	▶광장비 규격 : 24C - 광분배함 21C 1개,72C 1개 - 접속슬리브,피그테일,패치코드, 국내성단,코아접속,최종시험, 외피접속	광 케이블 24C를 수용할 수 있는 광장비 및 이에 따른 접속개소 반영
모니터시스템구축	▷ 모니터시스템(2개소) -위치:놀이동산,대공원상황실 -장비:모니터2대,서버1대 산업용 PC 1대	▶ 모니터시스템(2개소) -위치:놀이동산,대공원상황실 -장비:모니터2대,서버1대 산업용 PC 2대	시스템 안정화 운영효율성 강화 독립적인운영가능
기타	▷ 배관 설치 - 전량 신설	▶ 배관설치 -놀이동산:전기에서 기설치 -대공원: 기존배관 재활용	현장실정 반영

변경금액

❍ 계약금액 : 감4,148,250원

[단위 : 원]

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
납품금액		190,000,000	185,851,750	감)4,148,250
납품액	공급가액	172,727,273	168,956,136	감)3,771,137
	부가가치세	17,272,727	16,895,614	감)377,113
	계	190,000,000	185,851,750	감)4,148,250

조치의견

❍ 감독부서(시설관리공단)의 설계변경 내역과 같이 설계변경 시행하고자 함.

붙 임 : 1) 시설관리공단 보고서 1부

2) 설계변경내역서 1부. 끝.