문서번호	시설과-465
결재일자	2014.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
협조

「어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사」

설계변경(정산)보고에 따른 검토보고

동부공원녹지사업소

시설과

「어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사」

설계변경(정산)보고에 따른 검토보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사

❍ 개    요 : 화재수신기 1대,비상경보설비 2세트 및 유도등 18                  세트 설치 등

❍ 공사기간 : 2013. 04. 12 ~ 2014. 02. 17

❍ 도 급 액 : 10,669,000원

❍ 도 급 자 : (주)성림파워넷 대표 임성수

설계변경(정산)보고 검토

❍ 변경보고 : 공사감독3처-1120(2014.02.12)

가. 변경내용

공 종	당 초	변 경	변경사유	비 고
비상경보설비공사	*화재수신기~전기분전반 구간 전원 인입선로 미반영 *매표소동~과학영상관 소방 선로구성시 풀박스 반영	*화재수신기 전원 인입선로 반영 *매표소동~과학영상관 소방선로구성시 아웃트렛사각박스 반영	*현장실정 반 영	승인
기 타	*제경비(건강,연금,노인장기)정산 *배관배선등 현장실측물량 반영		미가입 -

나. 변경(정산)금액

[단위 : 원]

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
도급비	공급가액	9,699,091	8,795,455	감) 903,636
	부가가치세	969,909	879,545	감) 90,364
	계	10,669,000	9,675,000	감) 994,000

검토의견

❍ 공단에서 제출한 보고 내용과 같이 설계변경(정산)시행하고,준공처리 토록하여 업무 추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 설계변경(정산)보고 1부.  끝.