문서번호	방재시설부-15772
결재일자	2015.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
협조
	주무관

「잠원2빗물펌프장신설공사」

압구정로 기존암거 Block Out 부분 개선안 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

- 잠원2빗물펌프장신설공사 -

압구정로 기존암거 Block Out 부분 개선안 검토 보고

가동식 유역분리방식 사업변경안 추진에 따라 압구정로(현대고 앞)   기존 암거와 본 공사 자연방류관로가 접속되는 시점부 Bock Out 부분에  대한 개선안 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 잠원2감 2015-94(2015.11.23.) : 시점부 PC BOX 설치

□ 보고내용(관로 시점부 접속 관련)

○ 접속부 현황도

○ 접속부 비교 검토안

구분	평면도	검토내용
당초		- 접속부 상류측 기존암거 중간 벽체(3×2m) Block Out후 암거 폐쇄(평시 오수량만 통수 가능토록 웨어 설치) 당초 발주시 공사비 누락
기본설계변경안		- 기존암거 39m구간 Block Out(3×2m)시 하수암거 안정성 우려 - 현장여건과 변경안이 부합되지 않고, 케이블식 가동보설치(안)이 교통처리 및 시공성이 확보되지 않아 전면 개선방안 필요
실시설계변경안		- Pc Box 단계별 설치계획으로 시공성 및 안정성 확보 - 공기단축 및 공사시 점유차선 축소로 학교앞 교통 체증 경감으로 민원예방

□ 검토의견

○ 기존 암거구간(L=18m)을 신설 PC BOX로 재설치하여 하수암거

시설물 안정성 확보

○ 공기단축 및 단계시공에 따른 교통처리로 학교앞 주변 교통체증 경감

○ 감리단 의견

- 기존암거의 구조적 안정성 확보 및 원활환 교통처리를 위하여 Pc Box 설치타당 검토

□ 소요예산

○ PC BOX 규모

- □3×2m(L=18m),  □4×2m(L=18m)

○ 소요예산

- 174백만원(도급비 96백만원, 관급 및 폐기물 78백만원)

※ Block Out 부분은 당초 설계내역에 미반영됨.

□ 조치계획

○ 상기 검토의견과 같이 기존암거 Block Out 부분을 Pc Box로   사전 제작․설치토록 승인하고, 추후 설계변경시 반영․정산 코자 함.

붙임 : 감리단 실정보고 공문 1부.  끝.