문서번호	방재안전시설부-3646
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재안전시설부장
협조

「잠원2빗물펌프장신설공사 외1개소 전면책임감리용역」

준공기한연기 및 감리원 투입계획 변경에 따른 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

「잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면책임감리용역」

준공기한연기 및 감리원 투입계획 변경에 따른 설계변경 검토 보고

본 책임감리용역 시행중인 용허리빗물저류조 현장의 공정상 조경, 기계, 전기에 투입할 감리원 및 잠원2펌프장 공사중단(일시)으로 인한 토목 보조감리원 조정에 따른 감리원 투입계획 조정및  준공기한 연기에 대한 보고임.

1		관련근거

❍ 방재안전시설부-4893(`13.12.17) :【용허리공원 빗물저류조설치공사 준공기한 연기검토보고】

❍ 방재안전시설부-185(`14.01.06) :【잠원2빗물펌프장 신설공사 조경실정보고 검토】

❍ 신명감 2014-151(`14.03.06) :【감리용역 1차 1회 변경계약 요청】

2		용역개요

❍ 용 역 명 : 잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면책임감리용역

❍ 공사규모 : 잠원2빗물펌프장 신설 및 용허리 빗물저류조 설치

❍ 용역기간 및 용역비 :

구 분	전 체	1차분	비고
용역기간	`13.04.01~`14.09.30	`13.04.01~`14.03.11
용역비(천원)	1,108,750	628,000

❍ 용 역 사 : ㈜신명건설기술공사 외 2개사

3		보고내용

❍ 설계변경 사유

- 본 책임감리용역 시행중인 용허리빗물저류조공사 현장의 공정상 조경(`14.6.10),  기계 및 전기(`14.4.15)부분에 투입할 감리원의 투입 조정이 필요하고

- 잠원2빗물펌프장에 대하여는 민원에 의한 공사일시 중지에 따라 토목보조감리원에   대하여는 보완설계 검토등을 고려 `14.3.31까지만 투입

- 상기 두 현장여건을 감안한 감리원 재배치 및 준공기한 연기가 필요한 실정임

❍ 감리원 투입계획 및 준공기한연기

- 감리원 투입계획 변경(1차분)

구 분	당초(월)	변경(월)	증(감)	투입계획 변경 사유
토목 (책임)	11.3	14.3	3.0	공정에 따른 투입 조정
토목(보조1)	11.3	14.3	3.0	공정에 따른 투입 조정
토목(보조2)	11.3	12.0	0.7	잠원2 공정에 따른 투입 조정(`14.3.31까지 투입)
토목(보조3)	7.0	0	(감)7.0	시기 미도래
건축	4.3	0	(감)4.3	시기 미도래
조경	3.3	9.0	5.7	잠원2 및 용허리공원 조경부분 투입
기계	4.3	3.0	(감)1.3	용허리 빗물저류조 기계부분
전기	3.3	1.0	(감)2.3	용허리 빗물저류조 전기부분

- 준공기한 연기(1차분)

구 분			감 리 기 간	계약금액(천원)	비 고
1회 변경 (금차분)	전체분	당 초	2013. 4. 1 ~ 2014. 9.30	1,108,750	기간변동없음 계약금액 변경없음
		변 경	2013. 4. 1 ~ 2014. 9.30	1,108,750
	1차분	당 초	2013. 4. 1 ~ 2014. 3.11	628,000	용역기간 3개월 증 계약금액 변경없음
		변 경	2013. 4. 1 ~ 2014. 6.10	628,000

- 감리원 배치계획표

❍ 귀책사유 및 지체상금 부과 여부

- 귀책사유 : 도시기반시설본부

- 지체상금 : 미부과

4		조치의견

❍ 상기 보고내용과 같이 현장 여건을 반영한 공정상 감리원 재배치 투입 계획이 적정하므로

❍ 감리 용역비 증·감 없이 준공기한연기 및 설계변경(1차, 1회)을 시행하여 감리용역 추진에 만전을  기하고자 함.

붙임  1. 감리용역 설계변경 내역서(1차 1회) 1부.

2. 관련문서 각 1부.  끝.