문서번호	설비부-3845
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
협조

「장충체육관 리모델링 기계설비공사(1차)」

예비 준공검사 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

도시기반시설본부

(설 비 부)

「장충체육관 리모델링 기계설비공사(1차)」

예비 준공검사 실시 계획

장충체육관 리모델링 기계설비공사(1차)에 대하여 예비 준공검사를 실시하고자 함

□ 공사개요

○ 규    모 : 지하2층/지상3층, 연면적 11,429㎡

주차장/헬스장/커피숍/중식당/편의점 등 부대시설

○ 계약내용

구 분	계약금액(천원)	공 사 기 간	비 고
총 차	3,129,264	`12.7.5 ～`14.8.31
1 차	1,500,000	`12.7.5 ～`14.5.31	금회 예비준공검사
2 차	1,629,264	`13.12.2 ～`14.5.31

○ 시 공 사 : ㈜수정이엔씨  대표 배준현

○ 감 리 사 : 펨코엔지니어링(건축,토목,전기,소방), 아이티엠코퍼레이션(기계)

□ 관련근거

○ 건설기술관리법 시행령 제67조 제2항

○ 책임감리단 예비 준공검사 요청(‘14.4.7)

□ 예비 준공검사

○ 일시/장소 : ‘14.4.15(화) 14:00(장충체육관 리모델링 현장)

○ 점검자

연번	소 속	직 급	성 명	비 고
1	도시기반시설본부 설비부	공업 6 급	이 종 근
2	도시기반시설본부 설비부	공업 7 급	추 한 영

○ 입회자

연번	소 속	직 위	성 명	비 고
1	㈜아이티엠코퍼레이션	기계기술지원감리원	지용균
2	㈜펨코엔지니어링	소방기술지원감리원	이주철
3	㈜펨코엔지니어링	책임감리원	박영민

○ 검사내용

- 자재 품질 및 시공상태 확인

- 준공기한 내 준공가능여부 및 미진사항 점검 등

□ 추진일정

○ ‘14. 4. 15. : 예비준공검사 실시

○ ‘14. 4. 18. : 예비준공검사 결과 미진사항 보완 지시

○ ‘14. 5. 31. : 준공검사(예정)

□ 행정사항

○ 시설물유지관리 부서 직원 예비준공검사 참여 요청(체육진흥과 및 체육시설관리사업소)

첨부 : 책임감리단 예비 준공검사 요청서. 끝.