문서번호	설비부-3940
보존기간	년
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	열빛총괄과장

「장충체육관 리모델링 통신공사」

설계변경 소위원회 심의 요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

설  비  부

설계변경 소위원회 심의요청서

문서번호	설비부 -	요청부서	열빛총괄과	요청일	2014. 4. 14.
공 사 명	장충체육관 리모델링 통신공사
감리개요	공사규모	- 건축 연면적 11,429㎡(지하2층 지상3층, 문화 및 집회시설) - 통합배선설비 등 통신공사 1식
	공사기간	2012. 07. 04. ~ 2014. 08. 31.
	감 리 사	펨코엔지니어링 외 1
	설 계 사	화용이엔씨
	시 공 사	(주)디투엔지니어링
심의요청 사 유	∘ 3,000만원 이상 설계변경
<변경 사유> - 물가변동에 의한 계약금액 조정
주 요 변 경 내 용
- 제1회 물가변동에 의한 계약금액 등락 대상 : 증19,476,000원 - 제2회 물가변동에 의한 계약금액 등락 대상 : 증13,319,000원
별첨서류	심의자료 1부(별첨)

건 명 : 장충체육관 리모델링 통신공사

○ 현 황

계 약 명	장충체육관 리모델링 통신공사		시 공 자	(주)디투엔지니어링
공 사 규 모	- 지하2층 지상4층(연면적 11,429㎡) - 통합배선설비 등 통신공사 1식	계 약 금 액	501,147,060원 (전체공사)			계약일
						2012.7.04
공사기간	2012.07.04. ~ 2014.08.31..	감리자	펨코엔지니어링 외 1개사		설계자	화용이엔씨
계약형태	기타( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사( )				※ 작성자: 김은덕 ☎ 3708-8602

○ 변경 개요

- 제1회 물가변동에 의한 계약금액 등락 대상 : 증19,476,000원

- 제2회 물가변동에 의한 계약금액 등락 대상 : 증13,319,000원

- 도급액 변경 내용

구 분	변경전	변경후	증·감
도급액	501,147,060원	533,942,060원	증32,795,000원

○ 변경 배경

- 물가변동 조정 요건 충족(경과기간 90일 이상이고 지수조정율 3% 이상)

○ 설계변경 세부내용

구 분	내 용	선택 항목
설계변경 유형	① 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류. 상호모순 ② 지질, 용수 등 현장조건 상이 ③ 신기술, 신공법 적용 ④ 민원수용, 보수, 보강 ⑤ 피해 건물보상 ⑥ 정책, 계획 등 변경 ⑦ 구조형식변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 운반거리변경 ⑩ 유관기관요청 ⑪ 물가변동에 따른 계약금액조정	⑪
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 : 32,795 ② 감액 : 천원 ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편의증진, ⑦ 민원해소 ⑧ 설계구조보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	⑦

※  해당사항 우선순위로 복수 선택 가능

○ 설계변경 경위

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정

- 통신공사 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건 검토(감리단, 2014.4.7.)

- 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회,제2회) 검토 보고(설비부-3846호)

- 장충체육관 리모델링 정보통신공사 물가변경 심의 요청(2014. 4. 10)

○ 설계변경 승인절차

- 설비부 설계변경소위원회(계약금액 조정심의) ➞ 심의결과 반영 ➞ 변경계약 ➞ 공사시행