문서번호	도로관리과-663
결재일자	2018.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로포장안전팀장	도로관리과장

「절삭 폐아스콘 처리단가 원가분석 용역」

준공기한 연기 검토보고

2018. 1.

안전총괄본부

(도로관리과)

「절삭 폐아스콘 처리단가 원가분석 용역」

준공기한 연기 검토보고

「절삭 폐아스팔트콘크리트 처리단가 원가분석 용역」수행과 관련하여 자문회의 개최 후 검토·반영에 필요한 소요기간을 고려한바 과업의 절대공기 부족으로 이에 대한 준공기한 연기를 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 절삭 폐아스팔트콘크리트 처리단가 원가분석 용역

○ 용역기간 : ’17.12.01.~’18.01.14.(45일)

○ 용 역 비 : 14,550,000원

○ 용역업체 : (사)동양경제정보연구소

○ 용역내용

- 절삭 폐아스팔트콘크리트 배출 및 처리현황 분석

- 절삭 폐아스팔트콘크리트 톤당 처리단가 산정

□ 추진경위

○ ’17.11.29. : 용역 계약체결 통보(재무과 → 도로관리과)

○ ’17.12.08. : 용역 착수보고회 개최

○ ’17.12.11. : 처리업체(12개사) 현장 방문조사 실시

○ ’17.12.28. : 용역 1차 중간보고회 개최

○ ’18.01.08. : 외부전문가 초빙 자문회의 개최

○ ’18.01.11. : 용역 2차 중간보고회 개최

□ 검토내용

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	’17.12.01.～’18.01.14.(45일)	’17.12.01.～’18.01.29.(60일)	15일 연장
용 역 비	￦14,550,000	￦14,550,000	변경 없음

○ 연기사유

- 건설폐기물 처리단가 원가분석 용역 특성상 절삭 폐아스콘 처리업체의 협조가 절대적으로 필요하여 지속적으로 협조 요청하였음에도 불구하고 처리업체의 설문자료 제출 거부 등으로 과업이 지연되었으며,

- 1차 중간보고회 이후 원가분석 및 건설폐기물 처리 관련 외부전문가를 초빙하여 자문회의 개최 후, 과업 결과물 도출에 자문위원 의견 보완 등의 추가기간이 소요되어 이에 따른 준공기한 연기 필요

○ 귀책사유 및 지체상금 부과여부

- 귀책사유 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 처리의견

○「절삭 폐아스팔트콘크리트 처리단가 원가분석 용역」준공 기한을 연기하고, 관련 분야 외부전문가 자문의견을 반영하여 내실 있는 과업이 진행될 수 있도록 용역 시행에 만전을 기하고자 함

붙임 : 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.  끝.