문서번호	방재시설부-21093
결재일자	2017.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
협조
	주무관

「퇴계로 외 1개소 도로공간 재편공사」

조경 식재변경 실정보고 검토보고

2017. 12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「퇴계로 외 1개소 도로공간 재편공사」

조경 식재변경 실정보고 검토보고

「퇴계로 외 1개소 도로공간 재편공사」조경 식재변경 실정보고에 대한 검토 보고임. 【관련근거 : 성산퇴계(건) 2017-454(2017.12.8.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 퇴계로 외 1개소 도로공간 재편공사

○ 공사위치 : 만리재로(만리1구역~공덕오거리), 퇴계로(회현역7번출구~퇴계로2가)

○ 시 공 사 : ㈜크로스텍엔지니어링

○ 도 급 비 : 2,882백만원(조경 : 312백만원)

○ 공사기간 : 2017.1.1.~2017.12.27

□ 보고내용

○ 조경 식재 변경

- 변경사유

․ 관련기관(중구, 용산구, 마포구) 협의내용 반영

․ 띠녹지 형식 변경에 따른 수종, 규격, 수량 변경

․ 주민 민원사항 반영

․ 수목 보호판 설치 수량 변경

- 수량 변경

구 분		공 종	단위	당 초	변 경	증․감	비고
퇴계로	식 재	교 목	주	17	16	감) 1
		관 목	주	560	-	감) 560
	시 설 물	수목보호판	개소	17	16	감) 1
만리재로	식재기반	식재기반조성	㎡	961	504	감) 457
	식 재	교 목	주	73	72	감) 1
		관 목	주	7,030	5,205	감) 1,825
		초 화 류	본	-	1,440	증) 1,440
	시 설 물	수목보호판	개소	149	190	증) 41

○ 공사비 증감내용

(단위:천원)

구 분			당초	변경	증감	비고
직접공사비	퇴계로	식 재	51,235	11,390	감) 39,845
		시설물	6,473	6,092	감) 381
	만리재로	식재기반	8,274	4,340	감) 3,934
		식 재	102,847	114,170	증) 11,323
		시설물	57,108	72,641	증) 15,533
직접공사비			225,937	208,633	감) 17,304
제경비			57,654	52,758	감) 4,896
공급가액			283,591	261,391	감) 22,200
부가가치세			28,359	26,139	감) 2,220
도급액			311,950	287,530	감) 24,420

○ 설계변경 적용단가

- 협의단가 적용 : 93.374% <(낙찰율 86.748% + 설계가 100%)*1/2>

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 본 사항은 유지관리기관(중구청, 용산구청, 마포구청) 협의 내용과             주민민원, 현장여건 등을 반영한 조경공사 전반에 대한 정산사항이며,

○ 식재수종 및 규격, 수량변경, 수목보호판 수량변경 공사비는 공사계약         일반조건 6절(공사 설계의 변경)5.“가”의 1)항에 따라 추후 설계변경이         타당할 것으로 사료됩니다.

□ 보고자 의견

○ 조경 식재변경에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고           판단되어 실정보고 승인 통보하여 현장 반영하고 향후 설계변경 시           아래사항 검토 후 정산 반영 조치하고자 함

- 설계변경 적용단가는 별도의 협의결과에 의거 적용

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고 1부.  끝.