문서번호	도로보수과-5031
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장

「2014년 도로파손 긴급복구공사」

관급자재 규격 변경 계획(아스콘)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

(도로보수과)

「2014년 도로파손 긴급복구공사」

관급자재 규격 변경 계획(아스콘)

□ 공사개요

〇 공 사 명 : 2014년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-북부

〇 규    모 : 소규모 포장복구 37a, 절삭 덧씌우기 245a, 출동․대기 290hr 등

〇 공사기간 : 2014. 4. 8 ~ 2015. 2. 28

〇 도 급 액 : 571,839,650원

〇 계 약 자 : 유비럭스(주) 대표 김영근

□ 변경내역

〇 사유 : 대형차 교통량이 많아 소성변형 발생한 포장구간에 대한 보수용 자재로 사용키 위해 일부 수량 규격 변경이 필요함

〇 구간 : 흥인지문 주변(종로, 왕산로)

〇 규모 : L=320.4m, A=1,458.2㎡

〇 자재 현황

(단위 : 원)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
당 초	아스콘	WC-2, 표층	톤	6,098	78,125	476,406,250
변 경	아스콘	소 계		6,098		475,545,290
		WC-2, 표층	톤	5,924	78,125	462,812,500
		WC-5, 표층	톤	174	73,177	12,732,790

※ 아스콘 총 6,098톤중 1,800톤 조달구매하여 보수용 자재로 사용중

□ 조치의견

〇 상기 내용과 같이 관급자재(아스콘)를 변경 구매하여 보수용 자재로 사용하고 추후 설계변경 시 정산처리코자 함. 끝.