문서번호	시설관리과-5696
결재일자	2018.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
협 조

「2017년 배수지·가압장 기계설비 수리(장기계속계약)」

설계변경 및 심의위원회 개최 보고

2018. 03.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「2017년 배수지·가압장 기계설비 수리(장기계속계약)」

설계변경 및 심의위원회 개최 보고

「2017년 배수지․가압장 기계설비 수리(장기계속계약)」물량 증·감에 따른 설계변경(최종) 및 심의위원회 개최 계획을 보고 드림.

□ 계약현황

○ 사 업 명 : 2017년 배수지․가압장 기계설비 수리(장기계속계약)

○ 계 약 자 : 에이치피아이(HPI) 대표 최재민

○ 계약기간 : 2017.05.11. ~ 2018.03.31.

○ 계약금액 : 금46,689,390원

○ 사업규모

- 법무증압장외 3개소 모터펌프(8대) 수리

- 잡철물 제작설치 및 고재처리 1식

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정자치부 예규 77호, ’17.01.23.)       - 제15장 물품계약 일반조건_제6절 수량조절과 계약금액의 조정

□ 설계변경 사유

○ 온수가압장 모노레일 미설치 및 기타 계약물량 증감 등 - 9건

- 잡철물 제작설치(스텐레스, 간단구조) 등 - 5종

- 법무증압장 전동기(7.5Kw×2대) 결선 및 분리 - 1종

- 육본증압장 체크밸브 내식성 자재로 미 교체 - 1종

- 고재처리(고철)등 - 2종

※ 온수가압장 모노레일 미 설치 사유

- 온수가압장 모터펌프(20Hp×2대, 15Hp×2대) 교체 및 수리작업 등의 편의성을 확보하기 위하여 천정에 모노레일을 시공하고자 하였으나, 공간 협소 및 설비 난립으로 작업의 난이도가 높고 모노레일 설치에 대한 전문적인 기술력 부족으로 설치 불가 통보함에 따라 전문업체로 하여금 별도 시공 추진 예정임.

○ 계약물량 변경내역

공 종	규 격	단 위	당초수량	변경수량	증ㆍ감
잡철물 제작설치	스텐레스, 단순구조	ton	0.5	0	감) 0.5
- 스텐레스 앵글	40*40, 3t	m	39	0	감) 39
- 스텐레스 강판	3t	ton	0.4	0	감) 0.4
- 앵커볼트 설치	16mm	개소	64	0	감) 64
- 잡철물 철거	단순구조의 40%	ton	0.5	0	감) 0.5
전동기 결선 및 분리	7.5Kw 이하	개소	0	2	증) 2
스텐레스 체크밸브	150mm	대	2	0	감) 2
고철	경량B	kg	1,303	1,229	감) 74
폐스텐레스		kg	92	0	감) 92

○ 설계변경금액

(단위 : 원)

당 초	변 경	증․감
46,689,390	38,205,370	감) 8,484,020

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일    시 : 2018.03.27.(화) 14:00

○ 장    소 : 사업소 4층 회의실

○ 심의내용 : 설계변경 타당성 검토

○ 심의의원

- 위원장 : 시설관리과장

- 위  원 : 시설관리팀장등 6급 주무관 3명

- 간  사 : 공업6급 정진호

□ 행정 사항

○ 설계변경심의위원회 심의결과에 따라 최종 설계변경 시행.

붙임 : 1. 변경 및 기성내역서 각 1부

2. 설계변경 심의 결과서(양식) 1부.  끝.