문서번호	정수과-2283
결재일자	2017.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
협조

「2017년 정수처리시설 청소용역」

상반기 정수시설 청소 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

「2017년 정수처리시설 청소용역」

상반기 정수시설 청소 완료 보고

우리 정수센터에서 시행중인 『2017년도 정수처리시설 청소용역』 추진과 관련하여 상반기 청소를 완료하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진근거

정수처리시설 청소용역 시행계획(정수과-496, ‘17.2.10)

2017년 상반기 정수시설 청소 추진계획(정수과-899, ‘17.3.17)

Ⅱ		용역개요

용 역 명 : 2017년 정수처리시설 청소용역

계약기간 : 2017. 3. 7. ~ 2017. 12. 20.

계약업체 : 크린환경21(대표 이상복)

계약금액 : 금173,449,300원

청소물량

□ 주벽청소 227,066㎡, 정수지 청소 31,753㎡, 슬러지 청소 4,710㎥, 상등수 이송 2회

청소횟수

□ 연 1회 : 정수지, 활성탄흡착지

□ 연 2회 : 응집․침전지(웨어 및 수로 포함), 여과지, 배출수처리장

□ 연 2회 : 응집지 침전슬러지 및 배출수 처리장 농축슬러지 제거

※ 예산에 의거 응집․침전지 6개지는 1회/년

Ⅱ		추진결과

상반기 청소결과 : 연간 공정률 대비 48% 청소 완료

상반기 용역기간 : ‘17. 3. 27. ~ 6.30

(부 분) 준공금액 : 금63,272,090원

청소대상(1차 작업안내 내용)

□ 응집지(18지) 1회 : 주벽․패들․수로 청소, 바닥 퇴적물 제거 등

□ 침전지(18지) 1회 : 주벽, 바닥, 웨어 및 수로 청소

□ 여과지(56지) 1회 : 주벽, 유입수로, 중앙수로 청소

□ 활성탄흡착지(36지) 1회 : 주벽, 트라프 청소

□ 배출수 처리장 : 배출수지(4지), 배슬러지지(2지), 회수조(2지), 1․2차 농축조(각 2지)

청소완료 현황

□ 공정별 청소완료 내용

- 응집지 1회 : 총 24지 중 18지 청소완료

- 침전지 1회 : 총 24지 중 18지 청소완료

- 여과지 1회 : 총 56지 청소완료

- 활성탄흡착지 1회 : 총 36지 청소완료

- 배출수 처리장 1회 :

▸ 배출수지(4지), 배슬러지지(2지), 회수조(2지), 1․2차 농축조(각 2지) 청소완료

□ 청소완료 세부내역(계획물량과 동일하게 준공)

구 분	시 설 물	단위	계획물량	준공물량	비 고
주벽 청소	침전지(18지)	㎡	45,172	45,172
	침전지웨어(18지)	㎡	6,454	6,454
	침전지수로(4지)	㎡	2,185	2,185
	여과지(56지)	㎡	10,287	10,287
	응집지(18지)	㎡	21,281	21,281
	배출수지(4지)	㎡	3,536	3,536
	배슬러지지(2지)	㎡	1,323	1,323
	회수조(2지)	㎡	1,494	1,494
	1차 농축조(2지)	㎡	3,485	3,485
	2차 농축조(2지)	㎡	1,271	1,271
	활성탄흡착지(36지)	㎡	8,838	8,838
	소 계	㎡	105,326	105,326
슬러지 청소 (응집․침전지)	유입수로(4지)	㎥	35	35
	응집지(18지)	㎥	621	621
	소 계	㎥	656	656
슬러지 청소 (배출수처리장)	배출수지(4지)	㎥	142	142
	배슬러지지(2지)	㎥	208	208
	1차 농축조 (2지)	㎥	1,025	1,025
	2차 농축조 (2지)	㎥	220	220
	소 계	㎥	1,595	1,595
상징수 이송	농축조(4지)	회	1	1

Ⅲ		행정사항

2017년 상반기 정수시설 청소 완료

□ 1차 작업내용서에 따라 주벽 및 슬러지 청소 실시

□ 계획된 작업내용 물량에 대하여 청소 완료 하였기에 정산 및 1차 준공처리

2017년 하반기 정수시설 청소 추진 ☞ 【별도 계획 수립】

□ 하절기 장마 종료 후 전체공정에 대하여 2차 작업안내 및 청소실시 : 8월 중순

- 응집․침전지(24지), 여과지(56지), 정수지(4지), 배출수지(4지),

배슬러지지(2지), 회수조(2지), 1차 농축조(2지), 2차 농축조(2지)

□ 공사일정 등으로 인한 청소 요청시 우선 청소후 하반기 계획에 반영

붙임 : 1. 상반기 청소현황 1부.

2. 2017. 1차 완료내역서 1부.

3. 청소완료 사진자료 1부. 끝.