문서번호	생산관리과-@N
결재일자
공개여부	비공개(7)
방침번호

					시 민
주무관	생산관리과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
협 조
	경영관리부장
	요금관리부장
	급수부장
	시설안전부장
	구의아리수정수센터소장

『거리예술창작센터 조성에 따른』

구의취수장 폐쇄 계획

2014. 9.

상수도사업본부

생 산 부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	구의정수장, 동부수도	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『서울 거리예술창작센터 조성에 따른』

구의취수장 폐쇄 계획

구의취수장 부지를 활용한 서울 거리예술창작센터공사 계획이 확정됨에 따라 구의취수장을 ‘14.9.30. 폐쇄코자 합니다.

Ⅰ		관련 근거

❑ 2020년 서울수도정비기본계획 결정 (‘07.05.)

❍ 취수원 상류이전 방안 ⇒ 구의 및 자양취수장 상류 이전

❑ 서울 거리예술창작센터 조성 및 운영계획 수립(‘13.08.)

❍ 구의취수장 폐쇄 부지 공간 재활용하여 서울거리예술창작센터 조성

❑ 구의취수장 유상회계이관 결정(‘14.09.)

❍ 구의취수장 재산이관 계획 (문화정책과 2014.9.11.)

Ⅱ		현 황

❑ 구의취수장 시설 현황

❍ 1취수장 : 400~8008hp × 8대 ⇒ ‘10.10월 가동 중지

❍ 2취수장 : 400~7508hp × 6대 ⇒ 현재 가동 중

❍ 변전소  : 6000㎸ × 2대 ⇒ 현재 가동 중

❍ 염소투입실 : 염소투입기(56㎏/h) × 6대 ⇒ 현재 가동 중

❍ 관  사  : 건축물(43.54㎡) × 10동 ⇒ 미사용

※ 구의취수장 전경

구의취수장 전경(폐쇄 전)		서울 거리예술창작센터 조성 후

❑ 구의정수센터 원수 공급계획

❍ ‘14.9.30.까지는 구의 및 강북통합취수장에서 원수 공급

❍ ‘14.10.1.이후는 자양 및 강북통합취수장에서 원수 공급

- 구의정수센터 원수 공급 현황

기존(9.30일 이전)	폐쇄 이후
	‘14.10.1~12.31	‘15.1~’16.4	‘16.5 ~
구의취수장 (무료) :10만㎥/일	강북통합취수장 : 19만㎥/일	강북통합취수장 : 37만㎥/일	자양취수장(무료) : 27만㎥/일
강북통합취수장 : 9만㎥/일			강북통합취수장 : 10만㎥/일
소계 : 19만㎥/일	19만㎥/일	37만㎥/일	37만㎥/일
원수비 : 16억원/년	34억원/년	67억원/년	18억원/년

※ 2016년도 자양취수장(구의정수센터 원수 공급) 정비 예산 확보

Ⅲ		추진계획

❑ 구의취수장 폐쇄 결정

❍ 구의취수장 폐쇄 : 2014. 09. 30.

- 현재 가동 중인 2취수장 가동 중지

※ 1취수장 ‘10.10월 가동 중지

❑ 유상 회계 이관 추진 ⇒ 요금관리부, 구의정수센터 (붙임 1)

❍ 문화정책과 유상회계 이관 방침 : 유상금액 분납 납부

		문화정책과 방침내용
☞ 이관방법 : 유상이관 ⇒ 일반회계와 특별회계간 상쇄 후 차액지급 ☞ 지 급 액 : 5,475백만원 ☞ 지급방법 : 10년 분납(2016년~2025년, 이자포함 연간 약 6억원)

❍ 재무회계과 : 유상이관 재산(문화정책과 방침) 확인 후 징수조치

❍ 구의정수센터 : 재산이관 목록 작성

❍ 문화정책과 : 2016년부터 예산편성 후 납부 예정

❑ 구의취수장 취수펌프관로 폐쇄 ⇒ 도기본 시행 (문화정책과 예산)

❍ 폐쇄 개요 : D1650㎜×1개소

❍ 협조부서 : 구의정수센터, 동부수도사업소

❑ 구의정수센터 도수관로 연결 ⇒ 구의정수센터

❍ 도수관로 연결 : 소요예산 약 150백만원

구 분	공사 개요	소요시간	소요예산 (백만원)	비 고
연 결	D1200㎜×1개소	약 6시간	150	정수센터내 1,2도수관로 연결

- 예산확보 : 생산부 포괄예산 활용

❍ 구의정수센터 연결공사 사유

- 구의취수장내 도수관로 폐쇄 전 시행공사로 단수시간 단축

- 구의 #1,#2정수장 도수관(D1650㎜) by-pass 구축

※ 향후 자양취수장 활용시 구의정수센터 원수 공급으로 원수비 절감

❍ 공사의 시급성을 감안하여 동부수도사업소 단가계약업체 활용

❑ 원수공급 추진 ⇒ 강북정수센터

❍ ‘14.10.1일부터 강북통합취수장(구의계열)에서 구의정수센터에 공급하고 있는 원수를 추가 취수하여 공급 추진

❑ 시설물 인수·인계 ⇒ 문화정책과, 구의정수센터

❍ 구의취수장 시설물 인수·인계 : ‘14.09.30일한

- 시설물 인수목록 작성, 행정사항 등 제반사항 조치

❑ 누수복구 사무실 이전 ⇒ 동부수도사업소

❍ 자체계획 수립 후 이전 ⇒ ‘14.09.30.

❑ 잉여인력 재배치 ⇒ 경영관리부

❍ 구의취수장 근무인력 철수 : ‘14.09.30.

❍ 잉여인력 재배치 : ‘14.10.01.

❍ 업무 협조부서 : 생산부

Ⅳ		행정사항

❑ 서울거리예술창작센터 조성공사 착공(‘14.10.1.)에 지장이 발생되지 않도록 구의취수장 폐쇄 (’14.09.30일한)

❑ 해당부서는 자체계획을 수립하여 추진할 것

❍ 요금관리부, 구의정수센터 : 구의취수장 유상이관 추진

❍ 구의정수센터 : 도수관로 폐쇄, 인수·인계 등 행정 제반사항

❍ 강북정수센터 : 강북통합취수장(구의계열) 취수량 확대 추진

❍ 동부수도사업소 : 누수복구 사무실 이전

붙임 1. 구의취수장 재산이관(수도특별회계 → 일반회계) 계획 1부.

2. 도수관로 폐쇄 및 연결공사 현황. 1부. 끝.