문서번호	건축부-5694
결재일자	2016.5.2.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
협 조

『남부도로사업소 청사 신축공사』

실시설계 경제성(VE) 검토 시행 계획

2016. 5.

『남부도로사업소 청사 신축 공사』

실시설계 경제성(VE)등 검토 시행 계획

『남부도로사업소 청사 신축 설계용역』실시설계의 경제성(VE) 검토를

시행하여 예산절감, 기능향상, 구조적 안전 및 품질확보에 기여하고자 함.

1		시행근거

❍ 건설기술진흥법 시행령 제75조(설계의 경제성 등 검토)

❍ 설계의 경제성등 검토에 관한 시행지침(국토교통부고시 제2015-470호)

❍ 설계의 경제성 검토(VE) 가이드라인(서울시 기술심사담당관 2015.1.)

2		사업개요

❍ 위    치 : 금천구 시흥동 961-5외8필지

❍ 대지면적 : 2,440.70㎡

❍ 용    도 : 업무시설.근린생활시설

❍ 공사규모 : 지하1층,지상5층, 연면적 5,345㎡

❍ 총공사비 : 167억원

❍ 설 계 자 : ㈜플랜에이 건축사사무소

❍ 설계기간 : 2015.4. ~ 2016. 6.29.

3		추진경위

❍ ‘12.04.13 : 청사이전 계획 수립

❍ ‘14.10.28 : 사업의뢰(도로관리과→건축부)

❍ ‘14.12.26 : 설계공모 공고

❍ ‘15.04.10 : 설계용역 계약

❍ ‘16.03.22 : 건설기술심의

4		설계VE 수행계획

❍「설계VE 검토 TF」 구성 방안

- 총16명(총괄, 간사, VE 리더 및 VE 지원, 외부 전문가, 분야별 담당자)으로 구성

❍ VE leader는 40시간 이상 VE전문교육과정을 이수한 자로서 최고 수준의 VE전문가 자격증 소지자를 선정

❍ 설계VE 추진절차

- 분석단계(VE-Study) : 기본설계 VE 이행회의

- 실행단계(Post-Study) : 기본설계 VE 이행회의

❍ 수행기간 : 2016. 5.12. ~ 2016. 5.27.

❍ 주요 검토내용

- 설계에 적용된 재료․공법․시방의 적정성

- 설계․내역 누락 및 오류․불분명․적정성 등 확인

- 사용자의 편의를 고려한 설계 검토

- 기타 시공 중 설계변경 사전 예방 조치 등

※ 세부적인 시행 방법 및 절차는 설계의 경제성등 검토에 관한 시행지침(국토교통부고시 제2015-470호, 2015.6.30.)에 따름

5		운영 일정

❍ ‘16. 5.12. : 실시설계도서 위원 배포

❍ ‘16. 5.19 : 실시설계 VE 이행회의

- 제안의 채택 여부 결정

❍ ‘16. 5.27. : 실시설계 경제성 검토(VE) 보고서 작성

※ 일정 관련 변동사항 있을 시 유동적으로 실시

6		소요예산 : 7,198,762원

❍ 외부 전문가 수당 : 5,550,426원

- 264,306원/1일 × 3회 × 7인 = 5,550,426원

※ 근거 : 2016 엔지니어링 노임단가(특급기술자) = 264,306원

❍ 보고서 작성 및 편집 : 1,585,836원

- VE 리더 : 264,306원/1일 × 3회 × 1인 = 792,918원

- VE 지원 : 264,306원/1일 × 3회 × 1인 = 792,918원

❍ 보고서 작성 : 62,500원

- 실시설계VE 보고서 : 12,500원 × 5권 = 62,500원

❍ 예산 과목

- 정책사업명)도로관리과, 단위사업명)사업소 환경개선, 세부사업명)도로사업소 청사 신축,  통계목)시설비 및 시설부대비.

7		행정사항

❍ 설계 VE 팀원 구성 : 도시기반시설본부 각 분야별 업무담당자

❍ 예산확보 : 도로관리과에 의뢰

따로 붙임 : 설계VE 검토 TF 구성 명단 1부.  끝.