문서번호	급수운영과-3015
결재일자	2018.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	급수운영과장
협 조

『대흥동~염리동 우체국외 3개소 송배수관정비공사』

교통소통대책 수립 용역 추진계획

급수운영과

『대흥동~염리동 우체국외 3개소 송배수관정비공사』

교통소통대책 수립 용역 추진계획

’18년 마포구 지역에서 시행하는 『대흥동~염리동 우체국외 3개소 송배수관정비공사』 도로굴착공사 시행과 관련, 도로공사장 교통소통대책을 수립하여 공사에 따른 시민불편 사항을 최소화 하고자 함.

■ 관련근거

○ 서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례

【 제2조 3항(정의) 및 제3조(적용『대상) 】

※ 1개 차로이상 20일 초과시 교통소통대책을 수립하여야 함.

○ 행정2부시장 방침 기술심사담당관 - 10817호 (2010.08.02)

【도로점용공사장 교통소통대책 수립용역 개선방안】

■ 용역목적

○ 상수도공사로 인한 공사장 도로점용으로 대흥동~염리동 우체국외 3개소 공사 구간 차량통행에 대한 안전성 확보 및 원할한 교통소통을 위하여 교통소통대책을 수립 시행하므로서 시민불편 사항 최소화

■ 용역개요

○ 용 역 명 : 『대흥동~염리동 우체국외 3개소 송배수관정비공사』 교통소통대책 수립 용역

○ 공사위치 : 대흥동~염리동 우체국외 3개소

○ 사업개요 : 상수도관 부설공사 4개소 D=100~1000mm, L=1,025m

○ 총용역비 :  19,525천원

○ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후송배수관정비)

■ 추진계획

○ 추진일정

▶ ‘18. 02. 12 : 교통소통대책 용역 타당성심사 요청 (본청 기술심사담당관)

▶ ‘18. 02. 20 : 심사결과에 따른 발주 (전자수의계약 시행)

▶ ‘18. 02~04월 : 계약업체 교통소통대책 용역 수행

▶ ‘18. 04월 : 교통소통대책 용역 수행 완료

○ 『대흥동~염리동 우체국외 3개소 송배수관정비공사』 착공전에 교통소통대책을 수립 완료하여 상수도공사가 원할히 추진될 수 있도록 만전을 기하고자 함.

붙임문서 : 1. 공사 위치도 1부.

2. 용역비 설계내역서 1부.  끝