문서번호	교량보수과-6898
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
협조
	주무관

『두모교 보수공사』실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

『두모교 보수공사』

실정보고에 대한 검토보고

우리 사업소와 도급계약을 체결하고 시행중인 『두모교 보수공사』 추진중 위탁감독기관인 서울시시설관리공단으로부터 실정보고가 있어 이에 대한 검토 보고사항임.

공사개요

공 사 명 : 두모교 보수공사

공사기간 : 2014.04.29 ~ 2015.3.1

공사개요 : 교면방수 및 포장 A=134a, 콘크리트 단면보수 2,420㎡

P21 교강보강 1식

계약금액 : ￦2,145,065,800원

시 공 사 : 파워개발㈜ 대표 조성종

감독기관 : 서울특별시시설관리공단

위탁감독 실정보고 내용(공사감독2처-18271 ‘14.10.28)

보고내용

1. 방호벽 콘크리트 보수공사중 열화단면제거 두께 조정

※ 도로시설물 안전.유지관리 실태 감사 지적사항

- 열화부 두께 현장 조사후 단면 두께 결정(t=20mm→t=15mm)

구분	변 경 내 용		비 고
	당초	변경
열화단면제거	t=20mm(야간) A=2,420㎡	t=15mm(야간) A=2,420㎡	공사비 : 감)12,100천원

검토결과

1. 콘크리트 단면보수를 위한 열화부 제거(치핑) 작업시 페놀프탈렌 시약도포 검사결과 t=15mm를 제거시 알칼리반응이 확인되어 열화부제거 두께 조정이 타당함

검토의견

위탁 감독기관의 실정보고 내용이 적정하므로 보고내용과 같이 시행토록 승인하며 추후 설계변경 시 반영토록 서울시시설관리공단에 통보코자 함.

첨 부 : 공사실정 보고서 1부.   끝.