문서번호	시설과-2813
결재일자	2015.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	경영지원부장
협조

『박물관 수경시설 보수공사』

실정검토 및 설계변경 보고서

2015. 4.

시 설 과

『박물관 수경시설 보수공사』

실정검토 및 설계변경 보고서

수경시설 보수공사 시행 중 도급사로부터 실정보고 건이 접수되어 검토하고 아래와 같이 설계변경하고자 보고합니다.

1. 공사개요

가. 공 사 명: 박물관 수경시설 보수공사

나. 공사기간: 2015. 4.21. ~ 5.15.

다. 공사내용

- 실개천 방수 51㎡

- 거울연못 물넘이돌 36m 재설치(수평맞추기)

- 거울연못 및 바닥분수 판석 교체 4장 등

라. 도급금액: 18,600천원

마. 도 급 자: 재성종합건설(주) 대표 권영선

2. 실정보고사항 및 검토결과

가. 실정사항

- 신규 강자갈(4㎡) 추가 시공으로 기존보다 수위가 상승되므로 기존 방수계획높이로는 누수가 우려됨

- 당초 방수 계획높이보다 높게 시공(51→65㎡) 필요

나. 검토결과

- 방수공사 후 기존 호박돌에 추가로 자갈 포설되므로 방수층과 자갈층의 사이의 높이 상승이 불가피하며,

- 공사목적 달성을 위하여 자갈높이 상승 이상으로 방수층을 높게 시공하는 것이 타당하다고 판단됨.

3. 설계변경사항

가. 설계 변경사항

- 실개천 방수 물량변경(51→65㎡) 증 14㎡

나. 도급비 변동사항

(단위: 원)

구 분	변경 전	변경 후	증 감
도급비	18,600,000	20,020,000	1,420,000

4. 보고자 의견

공사품질 향상을 위하여 상기 실정사항에 대해서 변경하여 시행하고자 하며,

추후 설계변경 시행코자 함.

붙임: 도급자 실정보고서 1부.  끝.