문서번호	시설과-3792
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	경영지원부장
협조

『백인제가옥 조경 보완공사』

실정검토 및 설계변경 보고서

2015. 6.

시설과

『백인제가옥 조경 보완공사』

실정검토 및 설계변경 보고서

백인제가옥 조경보완공사 중 도급사로부터 실정보고 건이 접수되어 검토하고 아래와 같이 설계변경하고자 보고합니다.

1. 공사개요

가. 공 사 명: 백인제가옥 조경보완공사

나. 공사기간: 2015. 5. 14. ~ 6. 8.

다. 공사내용

- 무궁화 외 2종 11주, 영춘화 85주, 오죽 100주 식재

- 방근시트 11.8㎡

라. 도급금액: 17,600천원

마. 도 급 자: 신라조경건설(주) 대표 신명수

2. 실정보고사항 및 검토결과

가. 실정사항

- 오죽식재지 장대석 내측 방근시트 설치(0.6m 계획) 시공을 위하여 터파기 중 지면 0.3m 아래 콘크리트 기초가 있어 계획대로 시공 불가

- 오죽 식재를 위하여 기존 식재초종(참나리 외 1종 550본) 타 지역으로 이식 필요

나. 검토결과

- 방근시트 설치지역에 콘크리트 기초가 있어 높이 0.3m로 조정하여 설치하고,

- 오죽 식재를 위하여 기존 초화류 전량 굴취하여 일부는 식재지 지면피복용으로 재식재하고 잔여물량은 현장내 공지로 이식함이 바람직하다고 판담됨.

3. 설계변경사항

가. 설계 변경사항

- 방근시트 설치 물량 변경(11.6→5.8㎡)

- 참나리 200본, 기린초 350본 이식

나. 도급비 변동사항

(단위: 원)

구 분	변경 전	변경 후	증 감
도급비	17,600,000	17,600,000	0

4. 보고자 의견

공사의 원활한 추진을 위하여 상기 실정사항에 대해서 변경하여 시행하고자 하며, 추후 설계변경 시행코자 함.

붙임: 도급자 실정보고서 1부.  끝.