문서번호	시설과-8844
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
기전팀장	시설과장
협 조
	재무팀장

『북서울꿈의숲  증축관련 소방공사 감리 선임』

준공기한 연기 검토 보고

2015. 11.

『북서울꿈의숲  증축관련 소방공사 감리 선임』

『북서울꿈의숲 증축관련 소방공사 감리 선임』와 관련하여 건축기계소방 및 전기 소방공사 준공기한 연기 함에 따라 소방감리 선임을 아래와 같이 연기하고자 보고드림

준공기한 연기 검토 보고

1		개 요

▢ 공 사 명 : 북서울꿈의숲 증축관련 소방공사 감리 선임

▢ 위    치 : 서울시 강북구 번동 산 28-6번지 일대(북서울꿈의숲)

▢ 공사내용

- 전기소방공사 및 기계소방공사 감리 선임

▢ 감리기간 : 2015.10.23.~ 2015.12.22.

▢ 도 급 자 : ㈜원이엔씨  대표 임형관 외 2명

▢ 도 급 비 : 금3,100,000원

2		준공연기 검토의견

▢ 건축기계소방 및 전기소방 공사 준공연기 함에 따라 소방공사 감리선임 절대 부족으로 감리선임기간 연장하고자 함.

3		추진계획

▢ 감리선임기간을 연기하고 감리선임을 추진하고자 합니다.

○ 소방공사 감리선임 기간 연장

- 당초 : 2015.10.23.~2015.12.22.

- 변경 : 2015.10.23.~2016.03.15.(84일 연장)

※ 소방공사 감리선임 기간 연장에 따른 감리비용 증액 없음

▢ 지체상금 부과여부 검토

○ 연기사유 귀책소재 :서울시 중부공원녹지사업소

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.