문서번호	도시철도토목부-64
결재일자	2023. 1. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
이형일		권순환	01/03
			류용열
협 조	궤도과장			허동
	주무관			유원하
	주무관			임경태
	주무관			엄상민
	주무관			한승용

『서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 1, 2, 3공구 건설공사』

현장 합동 공정회의 개최 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 1.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 1, 2, 3공구 건설공사』

현장 합동 공정회의 개최 계획 보고

「서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 2공구 건설공사」와 관련, 발주청, 건설사업관리기술인, 시공사 관계자간 효율적인 업무수행과 현장소통을 위한 현장합동 공정회의를 개최하여 공정, 품질 및 안전관리 등에 만전을 기하고자 함.

1		관련 근거

○ 건설기술진흥법 제55조(건설공사의 품질관리)

○ 건설기술진흥법 시행령 제77조(공사의 관리)

○ 과업내용서 제1절 건술사업관리수행 공통사항(5. 회의)

2		사업 개요

구 분	1 공 구	2 공 구	3 공 구
위 치	강동구 중앙보훈병원 ~ 강동구 대명초교 입구 교차로 부근	강동구 대명초교 입구 교차로 부근 ~ 고덕아이파크 부근	고덕아이파크 부근 ~ 강동구 고덕강일1지구
규 모	L=1,348m 정거장 1개소	L=1,290m 정거장 2개소	L=1,486m 정거장 1개소
공사기간	'21.12. ~ '28.7.	'21.8. ~ '28.3.	'21.12. ~ '28.7.
공사비	1,487억원	2,248억원	1,333억원
시공사	㈜대우건설 외 4개사	㈜태영건설 외 5개사	한신공영㈜ 외 4개사
감리단	㈜천일 외 3개사	㈜유신 외 4개사	㈜동일기술공사 외 2개사

3		개최 계획

가. 공정회의 종류 및 개최 시기

회의명	일 시	장 소	참석대상	비 고
월간(합동) 공정회의	매월 첫째주 (화) 14:30 *'23.1월은 둘째주에 시행	현장상황실 (또는 도시기반시설본부 회의실)	- 발주청(부장, 과장, 공사관리관) - 책임 및 분야별 건설사업관리기술인 - 현장소장(현장대리인), 공무팀장, 공사팀장, 품질팀장, 안전팀장 등 * 필요시 하도급사 소장, 외부전문가	*월간 공정 회의장소는 9호선 4단계 3개 공구 순환 시행
주간 공정회의	매주 (목) 14:30		- 발주청(과장, 공사관리관) * 담당과장 : 격주로 참석 예정 - 책임 및 분야별 건설사업관리기술인 - 현장소장(현장대리인), 공무팀장, 공사팀장, 품질팀장, 안전팀장 등 * 필요시 하도급사 소장, 외부전문가	- 공구별 시행 - 월간 공정 회의가 있는 첫주는 주간 공정회의로 갈음 가능

※ 회의일정 등은 본부 및 현장 상황에 따라 조정될 수 있음.

나. 공정회의 주요 내용

○ 월간(합동) 및 주간 공정회의

- 월간 및 주간 결산, 익월 및 향후 주간 추진내용 보고, 문제점과 대책 토론

- 지시사항 및 기타 필요사항

○ 기타 공사 추진절차, 진도, 현안문제와 일정계획 등 필요사항

- 현지여건과 설계도서의 공법검토 등을 통하여 공정에 영향을 미치는 사항, 공종의 품질 및 안전관리사항 토론

- 민원발생이 예상되는 사항에 대하여 사전 원인 제거 또는 최소화 방안 토론 등

다. 진행 방법

○ 회의 주재 : 발주청(도시철도토목부장, 담당과장)

○ 공구별 공사추진 실적과 계획보고, 공사부진 시 부진공정 만회대책 보고

: 책임건설사업관리기술인, 현장소장

○ 공구별 현안사항과 협의 요청사항 보고 : 책임건설사업관리기술인, 현장소장

○ 공종회의 주요 내용 등 토론 실시 : 모든 참석자

○ 공구별 상호간 잘된 사례 벤치마킹과 횡단전개, 미흡한 사례 개선사항 공유

○ 현장 애로사항과 건의사항 등 본부와 현장간 소통의 시간 실시

4		행정 사항

○ 공정회의(월간, 주간)

- 회의자료는 회의 개최 2일 전까지 사전 제출(건설사업관리단 → 본부)

- 회의록(참석자 서명) 작성 관리(건설사업관리단)

- 회의 결과 보고(건설사업관리단 → 본부)

○ 발주청 지시사항 전달

- 현장 공정관리, 품질 및 안전관리, 시민불편 등 관련 업무지시.  끝.