문서번호	생산관리과-15809
결재일자	2017.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장
협 조

『서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 공사』

“관급자재 납품기한 연기 ”검토 보고

2017.  12.

상수도사업본부

[생 산 부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 공사』

“관급자재 납품기한 연기 ”검토 보고

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 공사

❍ 공사기간 : 2017. 10. 19. ~ 2017. 12. 27.

❍ 도 급 비 : 477,519,000원

❍ 도 급 자 : ㈜현우그린 대표 남상준

❍ 공사내용 : 다목적공간 조성 및 나비온실 지붕 재정비 등

Ⅱ		납품기한 변경계획

❍ 관급자재 내역

번호	품 명	규 격	조달번호	단위	수량	단 가	금 액	회사명
1	목재판재 (모말라)	1800×120×30	22230259	㎡	134.0	58,500	7,839,000	대덕목재
2	화강석경계석	150×150×1000	21442298	m	53.0	10,700	567,100	씨케이스톤
3	화강석경계석 (직선)	180×200×1000	21442264	m	40.0	17,300	692,000	씨케이스톤
4	화강석경계석 (곡선)	180×200×1000R	21442265	m	44.0	29,000	1,276,000	씨케이스톤
5	투수블럭	198×198×60	22364350	㎡	65.0	23,500	1,527,500	그랜드코단
6	측구수로관	D300	20911868	m	166.0	41,250	6,847,500	대명콘텍
7	집수정	600×600×1000	22781393	개	3.0	145,000	435,000	피씨엠산업
8	에코블럭	1000×1000×1000	23055519	개	139.0	275,000	38,225,000	우리꽃연구소
9	매직카펫	8cm포트	22209198	개	1289.0	1,500	1,933,500	우리꽃연구소
10	식물매트 (송악)	W340×L500×T40	22477408	㎡	240.0	12,400	2,976,000	우리꽃연구소
11	원추리 (개량종)	2~3분얼	22206734	본	288.0	1,000	288,000	우리꽃연구소
12	무늬비비추	8cm포트	22424953	본	124.0	670	83,080	우리들야생화
13	무늬맥문동	8cm포트	22659403	본	175.0	1,200	210,000	땅끝야생화
14	관중	17cm	22659401	본	82.0	3,000	246,000	땅끝야생화
15	수호초	10.2cm	22206729	본	124.0	750	93,000	우리꽃연구소
16	참나리	8cm포트	22659397	본	113.0	820	92,660	땅끝야생화
17	금낭화	10cm포트	22424678	본	62.0	750	46,500	우리들야생화
18	노루오줌 (아스틸베)	10.2cm	22206676	본	62.0	1,950	120,900	우리꽃연구소
19	흰줄무늬 대사초	8cm포트	22206675	본	72.0	1,120	80,640	우리꽃연구소
20	상록잔디 패랭이	8cm포트	22206725	본	82.0	1,640	134,480	우리꽃연구소
21	송악	8cm포트	22424981	본	103.0	670	69,010	우리들야생화
22	무늬둥굴레	10cm포트	22659402	본	134.0	900	120,600	땅끝야생화
23	바위취	8cm포트	22424959	본	206.0	370	76,220	우리들야생화
24	흙콘크리트포장	T100 습식	22581275	㎡	166	25,000	4,150,000	비전씨앤디
25	메쉬휀스	H1200×L2000	22342447	경간	36	111,100	3,999,600	대일휀스
26	잔디보호매트(설치도)	500×500×31	21889384	㎡	85	47,300	4,020,500	키그린(주)
27	안내판	600×900	22415396	개	1	1,034,500	1,034,500	오성씨앤디
	소 계						77,184,290
	조달수수료	0.54%			1식		416,790
	합 계						77,601,080

❍ 연기사유 : 서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 공사 준공기한 연기에 따른 관급자재 납품기한 연기

❍ 납품기한 변경

【당 초】 2017. 12. 15.

【변 경】 2017. 03. 15.

Ⅲ		보고자 의견

❍ 상기 내용과 같이 서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 공사 관급자재 납품기한 연기 후 본부 재무회계과로 변경 계약 요청코자 합니다.  끝.