문서번호	건축부-7831
결재일자	2014.6.27.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
협조

『성동소방서 신축공사 설계공모를 위한』

심사위원 선정위원회 구성계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『성동소방서 신축공사 설계공모를 위한』

심사위원 선정위원회 구성계획

성동소방서 신축공사 설계공모안의 심사를 위하여 아래와 같이『심사위원 선정위원회』를 구성하고자 함

Ⅰ		사업개요

○ 설계공모 개요

-	대지위치	:	성동구 행당도시개발구역 공공용시설2블럭(행당동 92-6번지 소재)
-	건립규모	:	지하1/지상4, 연면적 4,950㎡
-	예정공사비	:	11,599,000천원(부가세 포함)
-	설계비	:	588,181천원(부가세 포함)
-	설계기간	:	계약일로부터 9개월

○ 사업추진 경위

- 2012.10.12. 성동소방서 신설계획 수립(시장방침 제316호)

- 2014.01.29. 성동소방서 설계의뢰(광진소방서 → 건축부)

- 2014.05.01. 행당도시개발구역 개발계획 변경(사업부지 확정)

- 2014.06.10. 기술용역타당성 심사(적정)

- 2014.06.13. 서울시 건축정책위원회 자문

※ 자문 결과 : 제4차 건축정책위원회의 자문을 받은 소방행정타운 사례를 준용하여 진행하기 바람

- 2014.06.16. 경영감사담당관 일상감사

- 2014.06.26. 시설부지에 대한 토지 매매계약 체결(광진소방서, LH공사)

○ 사업추진 계획

- 2014.07.04. 심사위원 선정위원회 개최

- 2014.07.11. 설계공모 공고

- 2014.10.20. 작품접수

- 2014.11 ~ 2015.08 기본설계 및 실시설계(9개월)

- 2015.11 ~ 2017.05 공사시행(18개월)

Ⅱ		심사위원 선정위원회 개최계획

○ 추진방향

- 관련 분야의 전문성과 실무경험을 갖춘 심사위원 선정

- 사용자 중심의 설계안 심의를 위한 소방 관련 전문가 참여기회 확보

○ 선정위원회 위원 구성

- 건축정책위원회 : 박인석(1분과 위원장), 김영준(2분과 위원장)

- 발주부서 : 이병석(시설국 건축부장), 박범규(도시철도국 도시철도건축부),

- 주관부서 : 김옥석(광진소방서 소방행정과 장비회계팀장)

○ 심의일시 및 장소 : 2014.7.4.(금) 14:00, 건축부장실

○ 심의내용

구 분	심 의 내 용	비 고
심사인원	◦심사위원 위촉인원 결정 1안) 위원장 포함 9인으로 구성 2안) 위원장 포함 7인으로 구성
후보자 및 예비후보자	◦후보자 풀(pool) 구성 및 명단 결정 - 공공건축가+대학교수+서울시 건설기술심의위원 명단에서 선정 ◦후보결격 등의 사유를 대비한 예비인원 결정 등
기타	◦설계공모지침, 과업내용서 등에 대한 자문 등

Ⅲ		향후계획

○ 심사위원 선정위원회 심의결과를 반영하여 설계공모 시행.  끝.