문서번호	시설보수과-6390
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
협조
	주무관

『슬러지 야적장 옹벽설치 공사』

설계변경(정산) 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

『슬러지야적장 옹벽설치공사』

설계변경(정산) 시행 보고

『슬러지 야적장 옹벽설치 공사』에 대해 설계변경(정산) 시행 보고드림

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 슬러지 야적장 옹벽설치 공사

○ 공사기간 : 2019. 9. 16. ~ 2019. 12. 30.

○ 도 급 자 : (주)벽산엔터프라이즈  대표 김동운

○ 도 급 비 : 174,097,000원

○ 공사개요

- 역T형옹벽(2m) 260m, U형측구 60m, 옹벽설치 후 주변미화

Ⅱ		보고내용

○ 설계변경사유 : 공사 완료에 따른 시공물량 변동(증) 발생

○ 주요 설계변경 내용

공	규 격	단 위	수 량
			당 초	변 경	증ㆍ감
역T형옹벽	H=2m	m	260	247	감) 13
U형측구 설치	500 X 500	m	60	0	감) 60
	300 X 300	m	-	34	증) 34
	600 X 600	m	-	30	증) 30

○ 설계변경 금액

구 분		계약금액		증ㆍ감	비 고
		당초	변경
총공사비		174,097,000	172,260,000	감) 1,837,000
도급비	공급가액	158,270,000	156,600,000	감) 1,670,000
	부가가치세	15,827,000	15,660,000	감) 167,000
	계	174,097,000	172,260,000	감) 1,837,000

Ⅲ		조치계획

○ 상기 내용에 대하여 변경계약 정산코자  합니다.

붙임 :  1. 시공물량 변경사유서 1부.

2. 시공물량 내역서 및 수량산출서,도면 1부.  끝.