문서번호	설비부-14480
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	열빛총괄과장

『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 기계설비공사』

설계변경 소위원회 심의요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도시기반시설본부

설 비 부

설계변경 소위원회 심의요청서

문서번호

설비부 -

요청부서

열빛총괄과

요청일

2014. 12.  .

공 사 명

염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 기계설비공사

감리개요

공사규모

펌프 330 m³/ min x 2대 및 펌프실 증설(염창2)

펌프 190 m³/ min x 2대 및 펌프실 증설(방화)

공사기간

2013년 4월 1일 ~ 2014년 12월 30일

감 리 사

서울시시설관리공단

설 계 사

(주)선진엔지니어링

시 공 사

지정이앤씨(주)

심의요청

사   유

∘ 3,000만원 이상 설계변경(증액)

<설계변경 사유>

○ 운영부서의 방화빗물펌프장 준설토 적치장 설치 요구에 따른 환기,급수설비 추가

○ 방화 및 염창2빗물펌프장 신설펌프 밴트 (80A, 150A,  STS관) 누락

○ 기타 염창2빗물펌프장 건축 실배치 변경에 따른 오배수관 변경 등

<설계변경 금액>

구 분	변경전	변경후	증 감	비 고
총 차	97,422	150,343	52,921
1 차	55,000	95,495	40,495
2 차	42,422	54,848	12,426

주  요  변  경  내  용

◯ 염창2 펌프장 : 지배수배관 변경, 덕트교체, 오배수배관 변경

◯ 방화 펌프장 : 급수관 변경, 준설토 적치장관련 설비 추가

별첨서류

1. 설계변경 심의 자료 1부(별첨).

건 명 : 염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 기계설비공사 설계변경

■ 현 황

계 약 명	염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 기계설비공사	시 공 자		지정이앤씨(주)
공 사 규 모	펌프 330 m³/ min x 2대 및 펌프실 증설(염창2) 펌프 190 m³/ min x 2대 및 펌프실 증설(방화)	계 약 금 액	97,422,000원 (전체공사)				계약일
							2013.4.1
공사기간	′13.04.1 ～ ′14.12.31	감리자	서울시시설관리공단			설계자	(주)선진엔지니어링
계약형태	기타( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사( )				※ 작성자: 추한영 ☎ 3708-8610

■ 설계변경 개요

(단위:원)

공 종	당 초	변경 후	개략금액 (직접비)	비고
계			증)32,366
FAN,닥트	-	․ 휀, 닥트 설치 - 염창	증) 3,250
지배수배관	-	․ 지배수배관(150A) 설치 - 염창	증) 2,161
배수펌프 밴트	-	․ 밴트(80A,STS) 반영- 방화 ․ 밴트(150A,STS) 반영- 염창	증) 4,355
급수급탕 및 오배수 배관	-	․ 관리동 화장실 변경(당초2⇒1층)에 따른 급수급탕 및 오배수 배관 물량 변경 - 염창 ․ 급수관 교체 - 방화	증) 600
준설토적치장 신축	-	․ 준설토 적치장 내 환기설비 및 급수 수전 설치-방화	증)22,000

■ 설계변경 배경

○ 유지관리부서 요구사항 반영

○ 방화 펌프장 관리동 추가 설치 등

■ 설계변경 세부내용

구 분	내 용	선택 항목
설계변경 유형	① 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류. 상호모순 ② 지질, 용수 등 현장조건 상이 ③ 신기술, 신공법 적용 ④ 민원수용, 보수, 보강 ⑤ 피해 건물보상 ⑥ 정책, 계획 등 변경 ⑦ 구조형식변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 운반거리변경 ⑩ 유관기관요청 ⑪ 물가변동에 따른 계약금액조정	①,⑥ ⑩
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 : 53,606천원 ② 감액 : 원 ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편의증진, ⑦ 민원해소 ⑧ 설계구조보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	③,⑨

※  해당사항 우선순위로 복수 선택 가능

■ 설계변경 경위

○ 설계변경 승인내용

- 설계변경 실정보고 : 1) 【시설관리공단 강북공사관리처 10200호(2013.10.11.)】

2) 【시설관리공단 공사감독3처 12527호(2014.12.11.)】

- 설계변경 실정보고 승인통보  : 1)【설비부-12143호(2013.11.12.)】

2)【설비부-14210호(2014.12.12.)】

○ 설계변경 승인절차

- 설비부 설계변경소위원회(계약금액 조정심의) ➞ 설계변경 ➞ 변경계약 ➞ 공사시행

끝.