문서번호	설비부-6748
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	열빛총괄과장

『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』

설계변경 소위원회 심의요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

도시기반시설본부

(설 비 부)

설계변경 소위원회 심의요청서

문서번호	설비부 -	요청부서	열빛총괄과	요청일	2014. 6. 25.
공 사 명	염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사
감리개요	공사규모	수변전설비공사, 전력간선공사, 전등,전열 및 제어공사, 임시전기실 수배전반 설치 공사
	공사기간	2013.03.13. ~ 2014. 07.30
	감 리 사	(주)신화이에프원
	설 계 사	(주)선진엔지니어링
	시 공 사	(주)투윈스컴
심의요청 사 유	∘ 3,000만원 이상 설계변경(증액)
<설계변경 사유> ○ 수방기간전 토목공사 지연에 따라 임시 전기실 설치 및 수배전반 구성 ○ 물량누락반영 추가분 반영 <설계변경 금액> ○ 총차 : 당초 – 392,170천원 → 변경 – 463,174천원(증 71,004천원) ○ 2 차 : 당초 – 292,170천원 → 변경 – 363,174천원(증 71,004천원)
주 요 변 경 내 용
◯ 임시 전기공사(임시 인입케이블, 특고 및 고압 케이블 공사) ◯ 분전반 2면 누락분 반영 ◯ 임시 수배전반 이설
별첨서류	1. 설계변경 심의 자료 1부(별첨).

건 명 : 염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사 설계변경

■ 현 황

계 약 명	염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사		시 공 자	(주)투윈스컴
공 사 규 모	- 수변전설비 및 전력간선공사 - 전등,전열 및 제어공사 - 임시전기실 수배전반 설치 공사	계 약 금 액	392,170,740원 (전체공사)				계약일
							2013.03.13
공사기간	′13.03.13 ～ ′14.07.30	감리자	(주)신화이에프원			설계자	(주)선진엔지니어링
계약형태	기타( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사( )				※ 작성자: 곽용길 ☎ 3708-8604

■ 설계변경 개요

(단위:천원)

공 종	설계변경개요	변경금액(원)	비고
임시전기공사	- CN/CO 22kV 60㎟ : 117m - FR-CV 300㎟ : 130.5m 등	35,688
분전반 설치공사	- LOP #4 분전반 1면 - 지배수펌프 조작반 1면	3,572
임시수배전반 설치	- 수배전반 철거 및 설치	14,700
간접비		10,398
사용전점검수수료		191
소 계		64,549
부가가치세		6,455
설계변경 합계		71,004

■ 설계변경 배경

○ 임시 전기실 및 수배전반 설치에 따른 설계변경

○ 물량 누락분 추가 반영 등

■ 설계변경 세부내용

구 분	내 용	선택 항목
설계변경 유형	① 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류. 상호모순 ② 지질, 용수 등 현장조건 상이 ③ 신기술, 신공법 적용 ④ 민원수용, 보수, 보강 ⑤ 피해 건물보상 ⑥ 정책, 계획 등 변경 ⑦ 구조형식변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 운반거리변경 ⑩ 유관기관요청 ⑪ 물가변동에 따른 계약금액조정	①,⑩
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 : 71,004천원 ② 감액 : 원 ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편의증진, ⑦ 민원해소 ⑧ 설계구조보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	③,⑥

※  해당사항 우선순위로 복수 선택 가능

■ 설계변경 경위

○ 설계변경 승인내용

- 설계변경 실정보고 【신화 *******1호(2014.03.12.)】

- 설계변경 실정보고 승인통보 【설비부-3048호(2014.03.21.)】

○ 설계변경 승인절차

- 설비부 설계변경소위원회(계약금액 조정심의) ➞ 설계변경 ➞ 변경계약 ➞ 공사시행

끝.